문서번호	서울숲공원관리사무소-6297
결재일자	2016.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울숲공원관리사무소장
박선재		김완수	12/08 윤학수
협 조

『응봉공원 편의시설 개선공사 폐기물처리용역』

설 계 변 경 시 행 보 고

2016.  12

동부공원녹지사업소

(서울숲공원관리사무소)

『응봉공원 편의시설 개선공사 폐기물처리용역』

설 계 변 경 시 행 보 고

『응봉공원 편의시설 개선공사 폐기물처리용역』시행과 관련하여 현장여건 및 시공물량의 증.감 발생에 따라 설계변경을 시행하고자 아래와 같이 보고함

Ⅰ		용역개요

용역명 : 응봉공원 편의시설 개선공사 폐기물처리용역

용역개요 : 폐기물처리 341.95톤(폐콘크리트333.96톤,혼합폐기물7.99톤)

용역기간 : 2016.12.05 ~2016.12.25

계약금액 : 10,600,000원

도 급 자 : 서울환경 대표 양성희

Ⅱ		폐기물 발생 현황

폐기물 발생내역

대 상 지	작 업	종 류	비 고
응봉공원 농구장	처리	혼합폐기물 22.91톤	- 농구장 바닥 포장(우레탄) 처리물량 추가분
	운반	혼합폐기물 21㎥

폐기물 변경내역

구 분	폐기물종류	당 초	변 경	증 감	비 고
폐기물처리	폐콘크리트	333.96톤	333.96톤	-
	혼합폐기물	7.99톤	30.90톤	22.91톤
폐기물운반	폐콘크리트 · 폐아스콘	152.46㎥	173.29㎥	20.83㎥

Ⅲ		설계변경 금액

설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
총용역비		10,600,000	12,122,000	증1,522,000
도급비	공급가액	9,636,364	11,020,000	증1,383,636
	부가세	963,636	1,102,000	증138,364

예산과목 : 동부공원녹지사업소운영과, 공원녹지관리수준

향상및도시녹화지원, 공원관리 및 도시녹화지원,

응봉공원시설물정비,시설비

Ⅳ		행정사항

현장여건에 따른 물량변동 사항에 대하여 설계변경코자 함

붙임 : 설계변경내역서 1부.  끝.