“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	설계변경 계약 의뢰(도시고속도로 기능개선사업(2차) 기본 및 실시설계 용역)

우리과에서 시행중인 『도시고속도로 기능개선사업(2차) 기본 및 실시설계 용역』과 관련하여 아래와 같이 설계변경 계약의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 도시고속도로 기능개선사업(2차) 기본 및 실시설계 용역

나. 계약금액 : 191,345,000원

다. 계 약 자 : ㈜천일 대표 김석환

라. 계약기간 : 2015.12.21 ~ 2016.12.19

마. 설계변경사항                                             (단위 : 원)

구 분	당초(계약)	변경(계약)	증․감	비 고
계	191,345,000	181,313,000	감10,032,000

- 설계자문회의, 유관기관 협의에 따른 설계지점 변경에 따른 감액 발생

바. 예산과목 : 도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 도시고속도로

소통강화, 도시고속도로 기능개선, 시설비(401)

※ 명시이월 예산임.

붙  임 : 1. 설계변경 시행 공문 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.

	교통운영과장
★주무관	임홍필		교통개선팀장	이용구		교통운영과장	12/08 강진동
협조자	주무관	박평근
시행	교통운영과-23703	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관1동 6층 교통운영과	/
전화	02-2133-2467	/전송	02-2133-1053	/	ihp@seoul.go.kr	/	대시민공개