문서번호	한양도성도감-4151
결재일자	2016.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	도성보존팀장	한양도성도감과장		문화본부장
김종범	신추교	심말숙		12/08 고홍석
협 조
	주무관		최지애

한양도성 성벽 훼손구간

「인왕산 성벽 정밀조사 및 보수방안 마련 용역」설계변경

2016. 12.

문 화 본 부

(한양도성도감)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	문화재청 전문가 자문
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

한양도성 성벽 훼손구간

「인왕산 성벽 정밀조사 및 보수방안 마련 용역」설계변경

현재 추진중인 ‘인왕산 성벽 훼손구간 성벽 정밀조사 및 보수방안 마련 용역’과 관련하여, 인왕구간과 백악구간 비교연구 및 효율적인 용역수행을 위해 백악산 성벽 훼손구간 추가 과업을 인왕산 용역에 포함하여 추진코자함

Ⅰ		추진경위

□ 인왕구간 성벽 훼손구간 (`16.3.7 폭6.7m, 높이3.7m 성벽일부 훼손)

○ `16.3.7 : 전문가 현장자문(1차)

○ `16.3.9 : 문화재청(수리기술과) 합동점검

○ `16.5.13 : 전문가 현장자문(2차)

○ `16.6.2 : 성벽인접 전신주 철거완료

○ `16.6.17 : 추가붕괴 우려구간 여장 11타 제거완료

○ `16.11.17 : 발굴완료 및 전문가 현장자문 (백악구간 발굴조사시 비교참고)

○ `16.11.28 : 추가 보완 발굴 및 전문가 확인 완료

□ 백악구간 성벽 훼손구간 (`16.7.16 폭3m, 높이2.5m 성벽일부 훼손)

○ `16.7.18 : 전문가 현장자문

○ `16.9.12 : 추가붕괴 우려구간 여장 1타 제거 및 공사가림막 설치완료

○ `16.11.9 : 인왕산 성벽 발굴 관계자 현장 합동 조사

현장 전경	여장제거 및 가림막 설치

Ⅱ		추가과업 내용

□ ‘백악구간 성벽 훼손구간’ 정밀조사 및 보수설계

○ 성벽 훼손구간 발굴조사를 통한 성벽 내탁부 확인 및 기록

○ 보존과학적, 구조 정밀조사를 통한 보수범위·방법 마련

○ 원형성돌을 최대한 재사용할 수 있도록 성벽보수 설계 실시

훼손구간 발굴		보존과학적 구조 정밀조사		보수방안 마련 및 설계		성벽 보수공사
- 내탁부, 적심, 기저부 등 발굴조사 및 기록		- 지반 토질조사 - 면석 훼손상태, 강도조사 - 여장복원 여부에 따른 성돌 재사용 가능범위 시뮬래이션		- 해체보수 범위, 방법 마련 - 성벽 보수 실시설계 (내역서, 시방서 등 작성)		- 성벽 붕괴구간 및 주변 변형부위 보수정비 실시 (유실부 보충 및 해체보수)

백악구간 「성벽 정밀조사 및 보수설계」 과업 추가

□ 주요 과업

① 내탁부 발굴조사

- 성벽 훼손구간 축성기법, 시기를  조사 할 수 있도록 발굴조사 실시

- 발굴 내용 사진촬영, 모식도 작성 등 기록화

② 보존과학적 구조 정밀조사

- 보수 방향 마련을 위한 기초 데이터 조사 및 분석

- 면석 훼손상태 조사, 성돌 재사용 유무 판단을 위한 구조역학적 검토

- 여장 복원 여부에 따른 성돌 재사용 범위 시뮬레이션

③ 보수방안 확정 및 설계

- 보수방향 결정 : 각종 조사 내용을 바탕으로 보수 범위 및 방법 확정

- 보수 방안 마련결과를 토대로 실시 설계 실시

- 공사발주를 위한 설계도면, 내역서, 시방서, 수량산출서 등 작성

Ⅲ		설계변경 추진

변경사유 : 인왕구간 발굴ㆍ원인규명 비교 조사가 필요하며, 별도 용역 수행으로 발생하는 간접비, 경비 등 절감이 가능하여 과업추가 설계변경이  효율적인 상황임

○ 용 역 명 : 한양도성 인왕산 성벽 붕괴구간 정밀조사 및 보수방안 마련

○ 수행기관 : 한강문화재연구원(발굴) + 시립대학교 산학협력단(원인조사) + 볕터건축사사무소(보수설계)

○ 설계변경 사항

- 과업기간 : 당초 2016.8.31. ~ 2017.5.27 →  변경 2016.8.31. ~ 2017.7.14

- 계약금액 : 당초 152,246천원 → 변경 202,246천원(증50,000천원)  ※인왕구간 용역 계약단가 적용

- 추가과업 : 백악산 성벽 훼손구간 발굴·정밀조사 및 보수설계 (추가과업 별도첨부)

* 2017년 예산배정 후 설계변경 계약의뢰(재무과)

- 예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존 관리 활용, 한양도성 세계유산등재 및 시민 참여 활성화, 한양도성 학술조사 및 연구, 사무관리비(201-01)

Ⅳ		향후계획

□ 보수방안 마련 및 설계

○ `17. 1월 ~ 5월 : 백악구간 발굴 및 정밀조사, 보수설계안 마련

○ `17. 6월 : 문화재청 설계승인

○ `17. 7월 : 성과물 납품

□ 보수공사 추진

○ 계약심사 : `17. 7월

○ 입찰공고 : `17. 8월

○ 보수공사 착수 : `17. 9월~

붙임 : 1. 과업내용서(백악산 성벽 훼손구간 정밀조사 및 보수설계) 1부.

2. 설계변경 산출내역 1부.  끝.