투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(2회) 시행 [2016년 교통신호기 유지보수공사(연간단가-1구역)]

1. 우리사업소에서 시행중인 “2016년 교통신호기 유지보수공사(연간단가-1구역)”의 설계변경 사유가 발생되어 아래와같이 변경시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 교통신호기 유지보수공사(연간단가-1구역)

나. 도 급 자 : ㈜대한전력 대표 김미경

다. 공사기한 : 2016. 03. 15. ∼ 2016. 12. 31.

라. 계약금액 : *************

마. 변경사유 : 작업물량 조정 및 제경비 정산에 따른 설계변경

바. 변경금액                                            (단위 : 원)

변경 전	변경 후	증감액
***********	***********	**********

사. 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리, 교통신호기 신설 및 보수, 시설비(401-01)

첨부 : 1. 공사설계변경(제1회) 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(갑, 을) 각 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 제비율 검증표 1부. 끝.

주무관	신대중		기전과장	박심근		성동도로사업소장	12/09 이종엽
협조자	주무관	이명호
시행	기전과-10014	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 성동도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1541	/전송	20-2210-1536	/	ninjagubooki@seoul.go.kr	/	부분공개(7)