투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	지하철 9호선 3단계 919·920공구 토목구조물 인계일 제출 협조 요청

1. 서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(1공구)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 서울지하철 9호선 3단계(종합운동장～보훈병원) 구간은 2018년 10월 개통 예정으로서 토목구조물 인계 후 궤도공사는 2017년 1월 착수, 2017년 8월 말까지 도상con’c 타설을 완료해야 개통에 지장 없이 시스템분야 및 철도종합시험운행 등이 정상 추진될 수 있습니다.

3. 따라서, 해당 현장(919, 920공구)에서는 토목구조물 및 자재투입구(레일, 침목․레미콘 등)를 실지 전수 조사하여 인계 일정을 2016.12.14. 까지 책임감리원․현장소장이 지참 제출하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러, 토목구조물을 인계하기 위해서는 선형측량․내공(건축한계) 측량 결과 및 공구간 경계 접속좌표를 해당 공구에서 확인하여 제출하시고, 레일․분기기 등 자재반입 및 용접에 필요한 작업장은 600m 이상, 도상con’c 타설은 연속하여 1.0km 이상 필요함을 알려드립니다.

붙임 1. 서울지하철 9호선 3단계 900공구 토목구조물 - 궤도에 인계 일정계획(서식) 1 부.

2. 해당공구 자재투입구(레일, 침목․레미콘 등) 현황 1 부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사 (주)수성엔지니어링 책임감리원, 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사 벽산엔지니어링(주) 책임감리원
★주무관	성원배		궤도과장	최진규		도시철도토목부장	전결 12/09 代윤방식
협조자	주무관	조태현		주무관	代한재호		토목2과장	방영복
시행	도시철도토목부-15447	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 9층 (무교동 96)	/
전화	02-772-7241	/전송	02-772-7306	/	parandal@seoul.go.kr	/	대시민공개