투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경(전체10회, 5차1회) 시행(마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사)

1. 우리부에서 장기계속사업으로 시행중인 『마곡지구내 재생수공급시설 설치공사』에 대하여 아래와 같이 전체10회 및 5차1회 설계변경 시행하고, 계약을 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사

나. 도 급 비 : 전체 7,733,322천원

다. 공사기간 :  전체 2011. 11. 01 ∼ 2017. 04. 30

라. 도 급 자 : 유호산업개발(주)

마. 설계변경(전체 10회, 5차1회)

1) 설계변경 및 공기연장

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증ㆍ감	비고
전체10회	도 급 비	7,733,322,090	8,605,633,090	증 872,311,000
5차1회	도 급 비	541,868,580	1,414,179,580	증 872,311,000

2) 변경사유 : 서남물재생센터 내 공원 재이용수 공급관로 추가 부설 및 공기연장에 따른 간접비, 물순환정책과 공공용도 재생수공급을 위한 관로 추가 요구사항 실정보고 승인사항 반영

바. 예산과목 : 하수도사업특별회계, 물순환안전국 물재생시설과, 물재생시설개선 및 관리, 물재생시설개선, 마곡지구내 재생수공급시설 설치공사, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 1) 설계변경 보고서 1부.

2) 책임감리원 검토의견서 1부.

3) 설계변경(전체10회, 5차1회) 내역서 각 1부.

4) 합의각서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김소연		환경시설과장	조성만		방재시설부장	12/09 임춘근
협조자	계약1팀장	조현
시행	방재시설부-19577	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 (무교동, 프리미어플레이스 빌딩 14층)	/
전화	02)3708-8782	/전송	02)3708-8756	/	ruracom@seoul.go.kr	/	부분공개(5)