투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기 요청【광복교~안양교 도로확장공사】

우리본부에서 시행중인 『광복교~안양교 도로확장공사』에 소요되는 관급자재에 대하여 납품기한을 아래와 같이 연기하고자 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 관급자재 납품기한 연기 내역

품 명	업 체 명	납품 요구번호	규 격	단위	수량	납품기한 연기
						당 초	변 경
레미콘	서울경인레미콘공업(협) 배조웅	12-16-1-54763-00	25-21-80	㎥	300	2016. 12.20	2017. 6.30
		12-16-1-51597-00	25-24-150	㎥	163
			25-27-150	㎥	120
			25-16-120	㎥	11
흄관	㈜유정개발 최우경	12-16-1-58704-00	Φ1000(B)*2500	본	41	2016. 12.20	2017. 6.30
철근	동국제강㈜ 장세욱	12-16-1-51585-00	이형봉강,D13	톤	0.999	2016. 12.20	2017. 6.30
			이형봉강,D16	톤	6.125
			이형봉강,D19	톤	2.476
			이형봉강,D22	톤	1.476
			이형봉강,D25	톤	1.884
			이형봉강,HD13	톤	0.29
			이형봉강,HD16	톤	0.896
			이형봉강,HD19	톤	4.968
			이형봉강,HD22	톤	4.008
			이형봉강,HD29	톤	6.722

끝.

	토목부장
주무관	박운용		도시고속도로과장	명경출		토목부장	12/09 김영수
협조자
시행	토목부-25470	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-8664	/전송	02-3708-2599	/	parktiger93@seoul.go.kr	/	대시민공개