투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	관급자재(차선분리대) 납품기한 연기 요청

1. 도로보수과-11044(2016.11.04.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인『2016년 교통안전부속물 유지보수공사』에 소요되는 관급자재(차선분리대) 납품기한을 아래와 같이 변경요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 2016년 교통안전(도로) 부속물 유지보수공사(차선분리대)

나. 납품요구번호 : 12-16-2-53652-00

다. 계 약 자 : 다해산업개발  대표 김영현

라. 납품기한 연기

1) 당초 : 2016. 12. 10.

2) 변경 : 2016. 12. 30.

마. 변경사유 : 조달청 정기검사 지정으로 인한 전문 검사기관 시험결과 지연으로 납품기한 연기.  끝.

	도로보수과장
주무관	권세봉		도로보수과장	12/09 이규철
협조자	주무관	이상하
시행	도로보수과-12293	(		)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203 서부도로사업소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	300-8359	/전송	300-8364	/	se1212@seoul.go.kr	/	대시민공개