문서번호	기전과-9998
결재일자	2016.12.9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
이명호		박심근	12/09 이종엽
협조
	관리단속과장		박영종

『송정 건영아파트앞 교통안전표지공사』

준공기한 연장 검토보고

2016. 12.

성동도로사업소

(기 전 과)

『송정 건영아파트앞 교통안전표지공사』

준공기한 연장 검토보고

성동구청 토목과 토목공정지연으로「송정 건영아파트앞 교통안전표지공사」준공기한 연장을 하고자 함.

▣ 관련근거

○ 성동구청 토목과-12985(2106.11.04.)

- 건영아파트 앞 도로소통개선공사 착공 연기 알림

▣ 공사개요

○ 공 사 명 : 송정건영아파트앞 교통안전표지공사

○ 도 급 자 : ㈜다물그린 대표 김영옥

○ 도 급 비 : *************************

○ 공사기간 : 2016. 11. 16. ∼ 2016. 12. 31.

▣ 설계변경 현황

○ 준공기한 연장요청 사유

- ‘송정 건영아파트앞 교통안전표지공사’ 선행공정인 성동구청 토목공정의 지연으로 준공기한을 연장코자 함.

○ 준공기한 변경내용

구 분	당 초	변 경	비 고
준공기한	2016.11.16.∼2016.12.31.	2016.11.16.∼2017.10.31	성동구청 토목공정지연

▣ 조치의견

○ 상기와 같이『송정 건영아파트앞 교통안전표지공사』에 대하여 준공기한을 연장코자 합니다.

붙     임 : 1. 건영아파트 앞 도로소통개선공사 착공 연기 알림 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.