문서번호	도로보수과-11919
결재일자	2016.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	북부도로사업소장
이화신	이석재	12/09 신응수

설계 변경 검토 보고

- 광화문광장 차도구간 정비공사 -

2016. 12.

북부도로사업소

(도로보수과)

설계변경 검토 보고

- 광화문광장 차도구간정비공사 -

우리 사업소에서 시행중에 있는『광화문광장 차도구간 정비공사』에 대한 설계변경(1회) 검토 보고임.

1. 공 사 현 황

○ 공 사 명 : 광화문 차도구간 정비공사

○ 공사개요 : 차도구간정비 89.5a

○ 도 급 비 : 332,410,000원

○ 공사기간 : 2016. 10.20. ~ 2017. 06. 30.

○ 도급업체 : 승백건설㈜  대표  이기수

2. 설계변경 사유

○ 과속단속카메라 설치시 루프 설치가 가능하도록 정비구간 확대 및 실측에 의한 정비물량 조정 (89.5a→95a)

○ 기존 석재포장구간 28cm 철거후 단차로 인해 덤프트럭이 휘니셔를 밀고 올라갈 수 없으므로 시공성 확보를 위한 경사로 확보(5.76a, 3.5%경사 적용)

○ 화강석 철거 단면 조정 (16cm →18cm)

○ 표층 미시공에 따른 보행 도우미 배치 : 72명

(도로점용공사장 교통소통대책 자문결과 조치계획, 도로보수과-9760, 10.12)

3. 설계변경 내역

○ 공사비 변경 내용

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증, 감
총 공 사 비		882,823,600	970,000,000	증)87,176,400
도급비	공 급 가 액	302,191,455	371,569,510	증)69,378,055
	부가 가치세	30,219,145	37,156,950	증) 6,937,805
	계	332,410,600	408,726,460	증)76,315,860
관 급 비		377,413,000	442,273,540	증)64,860,540
이 전 비		173,000,000	119,000,000	감)54,000,000

○ 주요공종 물량변경 내용

공 종	규 격	구분	단위	수 량		증 ․ 감	비 고
				당 초	변 경
정비물량 합계			a	89.5	95	증 5.5
소규모 포장	인력		a	0	5.76	증 5.76	단차 구간
보행도우미	보통인부		임	0	72	증 72

○ 관급자재 등 변경 내용

구 분	규 격	규격	단위	수 량		증 ․ 감	비 고
				당 초	변 경
아스콘	WC-5		톤	1,516	1,600	증)84
아스콘	개질SMA		톤	1,083	1,140	증)57
아스콘	BB-2		톤	3,466	3,650	증)184
섬유그리드			㎡	2,850	2,850	변경없음

○ 건설폐기물 운반 및 처리 용역

- 물  량 : 6,064톤    → 6,321톤

- 용역비 : 94,940천원 →119,000천원

4. 조치계획

○ 상기 내용과 같이 “광화문 차도구간 정비공사” 및 “건설폐기물 운반 및 처리용역”에 대한 설계변경을 시행하고자 하며

○ 관급자재를 변경구매하고자 함.

붙  임 : 설계변경내역서 1부.   끝.