투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	설계변경 시행(2016년 도로교통소통 개선공사<교통신호기>)

우리사업소(기전과)에서 시행 중인 『2016년 도로교통소통 개선공사(교통신호기)』와 관련하여 아래와 같이 설계변경을 시행하여 사업완수에 만전을 기하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2016년 도로교통소통 개선공사(교통신호기)

2. 계약금액 : 금65,847,100원(금육천오백팔십사만칠천일백원)

3. 계약업체 : ㈜라이트 앤 휴먼  대 표 정 준 화

4. 계약기간 : 2016. 09. 26. ~ 12. 16.

5. 설계변경내역

가. 설계변경금액

구 분		금 액(원)			비 고
		당 초	변 경	증/감
도급비	공 급 가 액	59,861,000	55,853,637	△ 4,007,363	감
	부가가치세	5,986,100	5,585,363	△ 400,737	감
	계	65,847,100	61,439,000	△ 4,408,100	감

나. 설계변경 사유

① 신규물량 발생 및 시공물량 증감

② 제경비 정산

6. 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리강화, 도로교통소통 개선, 시설비

붙   임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 원가검증 1부.

4. 설계변경 방침서 1부. 끝.

	기전과장
주무관	전상은		주무관	김용문		기전과장	12/09 유재옥
협조자	주무관	노미경
시행	기전과-6497	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145	/
전화	02-3284-5433	/전송	02)3284-5470	/		/	부분공개(6)