함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(입상활성탄 재생 및 안트라사이트 이송 용역)

우리 정수센터의 「입상활성탄 재생 및 안트라사이트 이송용역」시행 중 설계변경 사유가 발생되어 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 건  명 : 입상활성탄 재생 및 안트라사이트 이송용역

나. 계약자 : 자연과학산업(주) 대표자 최승준

다. 기 간 : 2016.7.11. ~ 2016.12.17.

라. 설계변경 내용

(단위 : 원)
구 분	계약금액	설계변경금액	증 감	비 고
용역비	1,023,576,060	1,085,550,000	증 61,973,940

마. 설계변경 사유

- 신규공종(친환경오존접촉조 단기개선작업) 발생에 따른 증액분 반영

붙 임 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 합의서 1부. 끝.

주무관	최재준		주무관	박소현		정수과장	代김경진		영등포아리수정수센터소장	12/09 이성락
협조자	주무관	홍원해
시행	정수과-14061	(		)	접수		(		)
	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 (양화동1-29)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3146-5691	/		/	대시민공개