문서번호	계획설계과-10495
결재일자	2016.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	계획설계과장	급수부장		경영관리부장
최영서	이임섭	代이임섭		12/09 정진일
협 조

『우면산가압장 급수체계 개선 기본 및 실시설계 용역』

설계변경 검토 보고

2016. 12.

상수도사업본부

(급 수 부)

작 성 자	급수부장 : 이규상 ☎3146-1401 계획설계과장 : 이임섭 ☎1410 담당 : 최영서 ☎1414

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『우면산가압장 급수체계 개선 기본 및 실시설계 용역』

설계변경 검토 보고

『우면산가압장 급수체계 개선 기본 및 실시설계 용역』손해배상 보험료 정산과 절대공기가 부족하여 설계 변경코자 보고 드림.

Ⅰ		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 우면산가압장 급수체계 개선 기본 및 실시설계 용역

□ 용역내용

○ 암사저양정 송수펌프 교체 7대

○ 양재가압장 설치 1식, 송배수관 부설 D=1200mm, L=290m

□ 용역기간 : 2016. 5. 2. ~ 12. 27.(240일간)

□ 용역업체 : ㈜한국종합기술, ㈜선진엔지니어링종합건축사사무소

※ 사업책임기술자 : 김정헌

□ 계약금액 : 금284,570,000원

Ⅱ		설계변경 검토

□ 계약금액 변경

○ 손해배상 보험료를 실 납부금액으로 정산         감) 금1,325천원

- 설계 3,816천원  → 실 납부금액 2,491천원

○ 보험료 정산에 따라 부가가치세 등 감액          감)   금138천원

□ 계약기간 연장

○ 양재가압장 설치 부지가 서초구청 관리 말죽거리공원에 위치하여 업무 협의에 시일 소요 : 50일

- 협의 요청 ’16. 9. 7. →  서초구청 회신 ’16. 10. 27.

○ 설계 경제성등 검토(설계VE) 지연에 따라 설계VE 결과 반영을 위해 추가 기간 필요 : 25일

- 설계 VE 요청 ’16. 11. 4. →  검토회의 개최 ’16. 11. 29.

Ⅲ		검토 결과

□ 계약금액 변경

○ 당초 금284,570,000원 → 변경 금283,107,000원(감 1,463,000원)

□ 준공기한 변경

○ 당초 ’16. 12. 27. → 변경 ’17. 2. 28.(63일 연기)

Ⅳ		행정 사항

□ 변경 계약 의뢰( → 재무회계과)하고 당해 사업비를 ’17년도로 사고이월 조치

붙 임 : 1. 변경계약내역서 1부

2. 손해배상 보험 증권 2부.  끝.