문서번호	교통정보과-20129
결재일자	2016.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	교통정보팀장	교통정보과장
구지선	김맹순	12/09 이경순

2016년 실시간 교통량 수집체계 개선사업 감리용역

준공기한 연장 및 계약 변경 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

교통정보과

「2016년 실시간 교통량 수집체계 개선사업 감리용역」

준공기한 연장 및 계약 변경 계획

본 감리용역 대상 사업인『2016년 실시간 교통량 수집체계 개선사업』이 다양하고 열악한 현장여건에 따른 설치공사 절대 공기 부족으로 준공기한이 연기됨에 따라 공정 일치를 위해 감리원 투입 일정 및 준공기한 등 계약 변경을 시행하고자 함.

□ 추진근거

○ 2016년 실시간 교통량 수집체계 개선사업 준공기한 연기계획

(교통정보과-20080호, 2016.12.9.)

- 다양하고 열악한 현장여건에 따른 설치공사 절대 공기 부족으로『2016년 실시간 교통량 수집체계 개선사업』의 준공기한을 2017. 2.20일자로(당초 2016.12.31.) 51일 연기 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2016년 실시간 교통량 수집체계 개선사업 감리용역

○ 계약금액 : 46,070,380원(VAT 포함)

○ 계약일자 : 2016. 6.23 (착수일자 : 2016. 8.24)

○ 준공일자 : 2016.12.31

○ 계약상대자 : ㈜ 선진이엔지

□ 준공기한 연기계획

○ 준공기한 연기

- 연기사유 : 감리용역 대상사업과 공정 일치를 위해 감리용역기간 연장

연기내역	당초	변경	비고
준공기한	2016년 12월 31일	2017년 2월 28일	근무일수 21일

○ 준공기한 연기에 따른 감리원 투입계획 조정 계획

- 조정내역 : 비용 최소화를 위해 감리용역 준공기한 연장기간(2개월) 중 성능평가, 준공검사 등 필요 기간에만 투입

구분	2017년 1월	2017년 2월
근무기간	9일(1월 10일~ 20일)	12일(2월 13일~28일)
근무내용	2단계 성능평가 등	1,2단계 준공검사 등

<사업 변경 세부내역 – 낙찰율(87.508%) 적용>

구분		당초	변경	증감
순원가	직접인건비	13,914,723	16,969,175	3,054,453
	제경비	12,231,042	14,915,905	2,684,863
	기술료	5,229,153	6,377,016	1,147,863
	소계	31,374,000	38,262,000	6,888,000
정보시스템		10,231,164	10,231,164	0
손해배상 공제료		277,000	338,000	61,000
소계		41,882,164	48,831,164	6,949,000
부가세		4,188,216	4,883,116	694,900
총합계		46,070,000	53,714,000	7,644,000

□ 행정사항

○ ’16.12.9 : 계약변경 의뢰(→재무과)

구분	당초	변경	비고
준공기한	2016.12.31	2017.2.28	-
계약금액	금 46,070,000원	금 53,714,000원	증 7,644,000원

※ 예산과목 : 도시교통본부 교통정보과 –과학적인 교통정보서비스 구현 – 과학적 교통운영체계 구축(교통관리계정) - 교통량 수집 시스템 재구축 – 감리비(202-401-02)

붙임1. 2016년 실시간 교통량 수집체계 개선사업 준공기한 연기 방침서 1부.

붙임2. 산출내역서 1부.

붙임3. 준공기한 연기의뢰서 1부. 끝.