문서번호	관리과-15416
결재일자	2016.12.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★지방행정사무관대우		관리과장	중랑물재생센터소장
유화열		한병연	12/09 代한병연
협조

현대화시설 민간위탁관련

원가산정용역 발주계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

중랑물재생센터

현대화시설 민간위탁 관련

원가산정 용역 계획

한시적으로 민간위탁 결정된 제1처리장에 대해 운영경비 산정을 위한 용역을 시행하고자 함

1		산정기준 및 근거

○ 민간위탁 운영분야 운영비용 산정기준

- 위탁업체 : GS건설

- 위탁기간 : ’17. 5 ~ ’17.12(8개월)

- 위탁인원 : 20명(운영소장 1, 운영분석 6, 수처리 13)

(단위 : 명)

구분	합계	관리분야			운영분야						시설분야	기타
		소계	회계	홍보	소계	운영소장	운영분석		수처리		시설관리	청사방호	청소	공원관리
							중앙제어실	실험분석	행정	처리장
전체인원	29	3		3	20	1	4	2	1	12	2		2	2

※  1) 실험분석은 센터 실험실 이용

2) 센터 직영 : 9명(홍보 3, 시설관리 2, 기타 4)

⇒ 홍보 3(큐레이터 1, 운영관리 2)/ 기타 4 : 청소, 공원관리

○ 산정근거

- 행정자치부 훈령 지방자치단체 원가계산준칙 및 예규 지방자치단

체 원가계산 및 예정가격 작성요령, 환경부 지침 공공하수도시설

관리업무대행지침 및 동 지침의 부록3 공공하수도시설 운영대가

산정기준

- 위탁운영원가의 노임단가 적용시에는 통계법 제4조에 따른 지정

기관이 조사,공표한 단위당가격 또는 기획재정부 장관이 결정,고

시하는 단위당 가격을 적용하며, 인건비의 산정은 근로기준법 등

에서 정하는 근로자의 근로조건을 반영하여 인건비 및 제수당 등

산출

2		용역 개요

○ 과업명 : 중랑물재생센터 시설현대화사업 민간위탁 원가산정용역

○ 과업기간 : 착수일로부터 15일 이내

○ 소요예산 : 6,000천원

※ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 공통분야 유지보수,

시설비 및 부대비, 시설비

○ 수행기관 : 한국민간위탁경영연구소

○ 계약방법 : 수의계약

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 나목

(추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조․구매계약 또는 용역계약)

- 사유 : 금액이 소액이고 민간위탁경영연구소에서는 중랑물재생센터 직무분석 용역을 수행한 바 있으며, 우리시 4개 물재생시설 관련 용역 수행을 통한 다양한 자료와 경험이 축적되어 있어 내실 있는 성과 도출이 가능할 것으로 판단

3		용역수행과제

□ 과업의 범위

○ 중랑물재생센터 현대화시설(1처리장) 수처리분야 운영경비 판단

- 운영분야 20명에 대한 인건비 등 원가산정

- 수처리시설 운영유지를 위한 실질적 제반경비 산정

- 중랑물재생센터에서 위탁(분뇨,건조 및 탈수시설 운영관리 )수행

중인 환경관리주식회사 운영비용 비교 검토

- 기타 타 하수처리시설 위탁현황 비교분석

4		추진일정

○ ‘16.12.09	: 방침 수립

○ ‘16.12.14 이전 : 계약 및 착수, 착수 보고

○ ‘16.12.23 이전 : 중간보고

○ ‘16.12.27 이전 : 용역 최종보고 및 준공

붙임 : 1. 과업내역서 1부.

2. 산출기초조사서 1부. 끝