함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	시설안전부장 현장방문 시 지시 및 당부사항 통보

1. 우리본부에서 시행중인“구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사외 2개 현장”에 대하여 2014.3.14.(금) 시설안전부장 현장방문 시 지시 및 당부사항을 아래와 같이 알려드리오니,

2. 공사장별 책임사업관리자 및 책임감리원께서는 본 지시 및 당부사항을 숙지하시어 이행에 차질이 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 공사장별 지시 및 당부사항

공사장 별	지시 및 당부사항	비고
구의정수센터 재건설 현장	내오존방식재 성능평가기준 개정사항이 현장적용 가능한지 협의(시설과장)요망 준공후에 전기공사가 계속 시행되는 사례가 발생되지 않도록 공정관리 철저 모든 공정ㆍ공사관리함에 있어 안전관리를 최우선으로 시행할 것. 본 공사가 12월 준공임을 감안하여 조경은 ‘14.11.15 이전 식재 완료 공사추진관련 정수센터 관계자와 본부(토목, 건축, 기전설비) 담당자간 주기적 합동 회의(2주 간격)를 개최하고, 회의결과를 기록 유지할 것. 활성탄 입고시 시험 등으로 시간이 소요됨을 감안 시운전 등에 차질이 없도록 현장반입은 빨리 추진할 것.
뚝도정수센터 시설현대화 현장	진입도로 구간에 쇄석을 포설하여 노면상태를 정리할 것. 정수지 방식공사는 함수율이 8% 이내로 도달 시 시공할 것. 공사추진관련 정수센터 관계자와 본부(토목,건축,기전설비) 담당자간 주기적 합동 회의(월 1회)를 개최하고, 회의결과를 기록 유지할 것. 우기전 마무리 할 공정을 사전확인하여 조속 시행할 것. 타워크레인 작업, 타일 방수작업, 밀폐공간 작업 등 안전위해 요인을 가진 공정은 철저히 제반 안전관리 규정을 준수 공사 시행할 것.
올림픽대로 상수도관 이중화현장	동작대교 남단 무단수 연결관련 하천점용허가를 사전 득하여 시행할 것. 전진기지 수직구 관부설공사 시 감리단 및 현장소장이 입회하여 안전사고와 부실공사를 방지할 것.

.끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	구의정수센터 재건설 책임사업관리자,뚝도정수센터 시설현대화 책임사업관리자,옥림픽대로상수도관이중화 책임감리원
주무관	이재학		고도정수반장	이임섭		시설안전부장	03/19 代강신재
협조자
시행	고도정수반-85	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 서소문로 51	/
전화	3146-1453	/전송	3146-1429	/	hak2509@seoul.go.kr	/	대시민공개