문서번호	시설보수과-7175
결재일자	2016.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
최승룡		윤승범	12/12 代한병연
협조

『제3처리장 침전지 벽체 표면보수공사』

설계변경(정산) 시행보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『제3처리장 침전지 벽체 표면보수공사』

설계변경(정산) 시행보고

우리센터에서 시행중인 『제3처리장 침전지 벽체 표면보수공사』가 완료됨에 따라 아래와 같이 설계변경(정산) 시행코자 함.

1		사업개요

□ 공 사 명 : 제3처리장 침전지 벽체 표면보수공사

□ 공사기간 : ‘16.11.11 ~ ’16.12.15

□ 공 사 비 : 230,329천원

□ 도 급 자 : ㈜보광티앤씨  대표 윤채호

□ 공사내용 : 표면보수 4,591㎡, 기타부대공 1식

2		설계변경 현황

□ 금액변경 현황

구 분		당 초	변 경	증 • 감	비 고
총공사비		230,329,000	221,400,000	감 8,929,000
도급비	공급가액	209,390,000	201,272,728	감 8,117,272
	부 가 세	20,939,000	20,127,272	감 811,728
	계	230,329,000	221,400,000	감 8,929,000

□ 변경사유 : 제경비 중 보험료 정산에 따른 변경

3		조치의견

□ 위와 같이 설계변경(정산) 처리코자 함

붙임 : 설계변경내역서 1부.    끝.