문서번호	방재시설부-19699
결재일자	2016.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
조양연		조성만	12/12 임춘근
협조

『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』

설계변경(총괄14회,8차1회) 시행 보고

2016.12.12.

도시기반시설본부

(방재시설부)

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

설계변경(전체14회,8차1회) 시행 보고

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업과 관련 계약금액내 조정 분 실정보고(토공사외 9건)승인사항 반영 과 차수공사 계약금액중 2016년 국비배정 잔여금으로 인한 계약금액 조정을 위한 설계변경(전체14회, 8차1회) 시행 검토 보고임.

관련근거

○ 도화(감리) 2016-    (2016.12.09) : 전체14회, 8차1회 설계변경 도서제출

공사개요

○ 공 사 명 :『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』

○ 규    모 : 고도처리시설개량 115만톤/일, 시설현대화 36만톤/일,

○ 사업기간 : 총괄 2009. 11. 09 ~ 2017. 02. 28

- 8차  2016. 03. 25 ~ 2016. 12. 31

○ 도 급 비 : 총괄 312,237백만원, 8차 43,325백만원

○ 계약방식 : 설계·시공 입괄입찰(T/K)

○ 시 공 사 : 대림산업(주)외 4개사

○ 감 리 사 : (주)도화엔지니어링, (주)유신

관련근거

○ 입찰안내서 공사계약일반조건 제19조(설계변경등) 및 제19조의 2(설계서의       불분명․누락․오류 및 설계서간 상호모순 등에 의한 설계변경), 제19조의        3(현장상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경)

○ 입찰안내서 공사계약일반조건 제21조(설계변경으로 인한 계약금액 조정의 제       한 등) ⑥항에 의거 현장상태와 설계서의 상이 등으로 인하여 설계변경을 하       는 경우에는 전체공사에 대하여 증․감되는 금액을 합산하여 계약금액을 조정       하되, 계약금액을 증감할 수는 없다.

설계변경

【전체14회】

◦ 설계변경 내역                                            【단위: 백만원】

구 분		당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
전체공사 (14회)	직접공사비	195,923	197,540	1,617
	제경비	79,225	75,639	감 3,586
	물가변동	33,778	33,712	감 66
	계약금액조정	3,311	5,346	감 2,035
	계약 금액	312,237	312,237	0	조정없음.

◦ 주요 변경내용

구분	설계 변경 주요내용	공 사 비 (백만원)	비 고
계약금액내조정	․부력방지앵커 길이증가	97	방재시설부-9184 (2015.07.10.)
	․시설현대화 토공사 수량 변경	80	도시기반시설본부-16-1734 (2016.08.24.)
	․시설현대화 구조물 기초 공법 개선	628	도시기반시설본부-16-9676 (2016.11.09.)
	․교반기 사양 변경	0	설비부-14498호 (2015.11.18.)
	․이차침전지 세척수 배관 변경	감 10	도화(서남)2015-393호 (2015.12.01.)
	․농축기 사양 변경	1,309	설비부-8266호 (2016.05.25.)
	․바닥배수펌프 사양 변경	22	설비부-8266호 (2016.05.25.)
	․생물반응조 지배수펌프 추가 설치	10	설비부-8266호 (2016.05.25.)
	․시설현대화 약품 변경	감 35	설비부-8266호 (2016.05.25.)
	․물가변동금액	감 66
	・ 계약금액 조정분	감 2,035
계		0	계약금액은 조정없음.

○ 변경사유 : 실정보고 승인사항 반영(토공사외  9건)

【8차 1회】

◦ 설계변경 내역                                       【단위: 백만원】

구 분		당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
8차1회	순공사비	26,820	25,279	1,541
	제경비	10,802	9,849	953
	물가변동	5,703	4,919	784
	합 계	43,325	40,047	3,278

◦ 주요 변경내용

구분	설계 변경 주요내용	공 사 비 (백만원)	비 고
8 차 공 사	토공사	49	물재생시설과-15565 (2016.11.03.) 서남물재생센터 시설현대화사업 예산 재배정(시설비) 도시기반시설본부 -16-10299호 (2016.11.28.)
	구조물공사	3,061
	부대공사	278
	기계 배관공사	96
	기계 기자재공사	1,294
	전기공사	197
	직접공사비	1,541
	제경비	923
	물가변동비	784
	건설폐기물처리용역비 설계변경 반영	30	도시기반시설본부 -16-9103호 (2016.10.24.)
계		3,278	국비 미배정분

○ 변경사유 : 실정보고 승인사항 반영(공종조정설계변경 외 1건) 및 시설비 미배정 잔액(국고보조금 32억)에 따른 차수공사 물량조정, 건설폐기물처리용역비 반영(30백만원)

→ 「계약금액 감3,278백만원」

감리단 검토의견

○ 총괄14회변경은 공사계약일반조건 제21조 6항에 의거 전체 계약금액 증감없이 계약금액내 조정으로 설계 변경코자하며,

○ 8차공사는 시설비 재배정시 미배정된 국비 3,248백만원(건설폐기  물처리용역 설계변경 금액 30백만원을 감 조정 반영)을 감하여40,047백만원으로 설계변경 시행코져 함.

○ 설계변경 시행 내역

구분		당초	변경	증감	비고
총괄14회	공사비	312,237,000,000	312,237,000,000	변경없음
	공사기간	‘09.11.09 ~ ’17.02.28	‘09.11.09 ~ ’17.02.28	변경없음
8차공사 (1회변경)	공사비	43,325,540,000	40,047,010,000	감 3,278,560,000
	공사기간	‘16.03.25 ~ ’16.12.31	‘16.03.25 ~ ’16.12.31	변경없음

조치의견

○ 감리단으로부터 제출된 설계변경도서를 검토한 바, 계약금액내 조정 실정보고 9건과 차수공사 시설비 미배정금액에 따른 실정보고 승인 사항을 반영한 것으로,

○ 책임감리원의 검토의견이 적절하다고 판단됨으로 보고내용과 같이 설계변경(전체14회, 8차1회)을 시행코자 함.

붙임 : 1) 책임감리원 검토의견서 1부.

2) 변경내역서(전체14회, 8차1회) 1부.끝.