보  고  서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이상욱	이경희	12/12 최철민

제 목 : 급수공사 연기 보고

=============================================================

명에 의하여 급수공사 업무수행 중 급수공사 연기신청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

▢ 현  황

작업지시 번호	위 치	작업승인 공문	비 고
신설-244	관악구 신림동 1659-31	급수운영과-27862(2016.11.30.)
신설-245	관악구 신림동 1659-28	급수운영과-27861(2016.11.30.)
신설-247	관악구 신림동 1666-29	급수운영과-27735(2016.11.29.)

▢ 보고 내용

○ 상기 공사건에 대하여 급수공사 작업지시 하였으나, 비계 미철거 및 자재적치의 사유로 건축 공사현장의 공기가 늦어져  12월 말에 공사요망

○ 신청인으로부터 급수공사 연기신청이 접수되어 부득이 급수공사 준공연기가 필요한 실정임

▢ 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 조치 계획

○ 위와 같은 실정으로 아래와 같이 공사기간을 연기하여 급수공사 시행에 만전을 기하고자 합니다.

작업지시 번호	당초 작업기간	변경 작업기간	비 고
신설-244	2016.12.6.~12.19.	2016.12.6.~12.30.
신설-245	2016.12.6.~12.19.	2016.12.6.~12.30.
신설-247	2016.12.6.~12.19.	2016.12.6.~12.30.

붙임 : 준공 연기원 1부.(별첨)  끝.