문서번호	인력개발과-28165
결재일자	2016.12.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		복지노무팀장	인력개발과장
윤진석		김지형	12/12 유보화
협조

서천연수원 외부목재데크 개선공사 설계변경 보고

2016. 12.

행  정  국

(인력개발과)

서천연수원 외부목재데크 개선공사 설계변경 보고

「서천연수원 외부목재데크 개선공사」와 관련 이용고객 편의제공을 위한 카트길 조성 및 현장여건에 따른 물량 조정 등에 대한 설계변경 검토 보고임

□ 추진근거

○ 서천연수원 외부목재데크 개선공사 설계변경 제출[태성서천2016.12-02(‘16.12.9)]

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서천연수원 외부목재데크 개선공사

○ 공사내용 : 외부목재데크 철거 및 설치(1,443㎡)

○ 공사금액 : 173,892천원

○ 공사기간 : ‘16.10.27 ∼ 12.15

○ 시공회사 : ***********

□ 검토내용

○ 설계변경 근거 : 공사계약일반조건 제6절.1.설계변경

- 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우

- 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우

○ 설계변경 내용

(단위: 원)

구 분	항 목	순 공사비	변 경 사 유	비 고
발 주 처 요구사항	카트길 조 성	13,418,077	- 카트를 사용하는 고객들의 이용편의를 제공하기 위하여, 다산관에서 주차장으로 가는 길의 요철 구간 평탄화/ 지장물(가로등,회양목) 이설과 카트길 폭 확장/포장
현장상이	물량증감	49,840	목재데크 철거 후 현장확인 결과 C구간 하부 도면과 현장 상이하여 (당초:H․BEAM → 변경:슬래브) 물량 증감
	물량추가	3,288,855	데크설치 외측 마감면 물량 추가 (난간하부)
합 계		16,756,772

※ 세부내역은 붙임 참조

○ 변경금액

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 액	비 고
순공사비	105,564,348	121,470,848	15,906,500	폐기물 제잡비에 합산
제 잡 비	68,327,652	74,520,992	6,193,340
공사금액	173,892,000	195,991,840	22,099,840

○ 소요예산

(단위: 원)

예 산	원인행위액	집행잔액	낙찰차액	품의 가능액
300,000,000	272,268,490	1,798,740	25,932,770	27,731,510

※ 예산과목 : (조직)행정국 인력개발과, (정책)인적자원 역량강화, (단위)수련원 관리사업 (세부)연수원운영, (편성목)시설비및부대비, (통계목)시설비

□ 처리의견

○  검토결과 설계변경 내용이 타당하다고 사료됨으로, 공사의 시급성을 감안 우선시공 후 정산 설계변경 하고자 함.

○  소요예산은 집행잔액이 부족함으로 낙찰차액을 사용하여 집행

첨 부 1) 설계변경 내용 1부.       2) 변경도면 1부.

3) 변경내역서 1부.          4) 현황사진 1부.  끝.