문서번호	서울특별시농업기술센터-20043
결재일자	2016.12.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
환경농업팀장	농업기술과장	소장
진우용	권혁현	12/12 김영문
협 조

2016년 온실 빗물이용 시설원예 안정생산 시범 추진결과

2016.  12.

농업기술센터 농업기술과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 온실 빗물이용 시설원예 안정생산 시범 추진결과

❍ 지하수 오염 및 부족지역의 농업용수 확보하고 농업용수 수질

개선으로 고품질원예작물 생산기반 마련

❍ 물부족 대비 빗물을 이용한 자연 순환형 채소재배기술 보급

1

추진방향

용수부족  및 지하수오염 시설채소지에 우선 보급 설치

농업기술센터보유 실습교육장에 설치하여 대농업인 교육장으로 활용

농촌진흥청 기술이전 업체와 협의하여 특허기술부분 설치

2

사업개요

사 업 량 : 1개소 (2,800㎡), 12농가 28a

❍ 사업장소 : 강서 힐링체험농장(강서구 과해동 22-2)

시범요인

❍ 빗물이용 시스템을 활용한 원예작물재배에 적합한 농업용수 확보로 연간

750톤 농업용수 절약

❍ 적합한 농업용수의 안정사용으로 품질향상 및 농가소득 증대

주요 시설내역

❍ 빗물 집수장치, 초기빗물 배제장치, 여과장치, 빗물 매립저장탱크

(저장용량 75㎥(75톤), 지상관수탱크 18톤, 관수장치, 보호시설 등

- 종합콘틀롤박스, 우적센서 등

사업비 : 50,000천원(국비 50%, 지방비 50%)

❍ 집수장치, 저수조, 관수시설 포함

3

사업내용

사업대상지 선정 조건

❍ 농업시설의 설치에 대한 법적 제한이 없는 지역

※ 국토의계획및이용에관한법률, 보금자리주택건설에대한특별법 등 공공

개발 사업예정 및 지정이 되지 않은 지역

❍ 많은 농업인이 수시로 관찰할 수 있는 지역

❍ 해당하는 사업의 목적과 효과를 충분히 거둘 수 있는 곳

❍ 시설원예 주산단지 중 빗물이용시설 설치 가능한 지역

❍ 설치업체 선정 및 계약방법

- 농촌진흥청 기술이전업체와 토목자격 업체 포함한 공동 수급 공고

- 빗물수집장치등 특허기술부분은 기술이전업체가 포함되도록 단독 또

는 공동수급 공고로 기술이전업체 시공계약 선정

사업추진 경과

항 목	시 기	추 진 내 용
․기본계획 수립	1월	․기본계획 수립
․사업 공고․홍보 및 신청자 접수	1.12~ 2.03	․홈페이지 및 새해농업인 교육 등 홍보
․사업신청자 현조조사	2.15~ 2.19	․ 시범사업 대상지 현지조사
․사업 대상자 선정 심의회	2.26	․지원사업 심의 및 결정(산학협동심의회 11명)
․사업 대상지 사전 교육	3.10	․시범사업 대상지 현장 정밀 실사
․시범사업 설치 계약업체 선정 등	10월	․온실빗물이용 시설 설계서 작성 ․공개경쟁 입찰에 의한 시공업체 선정
․시범사업 설치공사 및 준공	10~11월	․설계도서에 의한 설치 및 현장 감독 ․설계도서에 의한 시공여부 준공검사
․지원사업 결과 평가회	12월	․온실빗물이용 시설 시범사업 결과분석 등
․사업완료보고서 제출 등	12월	․ 저수조와 연계 관수시설추가 등 · 사업결과성과 등 분석 및 결과보고 등

관련사진자료

빗물수집 장치	저수조 탱크	종합제어 장치	시범사업 평가회

4

사업성과 분석

평가회 실시결과

❍ 2016.12.2

❍ 장소 : 시범사업지〔힐링체험농장(강서구 과해동 22-2)〕

❍ 참석인원 : 15명(인근농업인)

❍ 평가내용 : 사업추진경과설명, 시범요인분석, 현장연시, 설문조사 등

사업만족도 설문조사 결과

❍ 참석자 현황(설문응답자/참석자 : 15명/15명)

계	성별		연령별 분포
	남	여	40대	50대	60대이상
15(명)	15	-	0	4	11
100%	100	-	0	26.6	73.4

❍ 참석자 설문조사 결과 요약

- 사업의 보급성 유무 : 보급성있다 100% (보급성있다 15명, 없다 0명)

- 본사업 평가 : 만족도 100%(매우만족 11명, 만족 4명)

- 사업지속 희망 여부 : 지속의사 100%(지속희망 15, 안하겠다 0)

추진성과 및 착안사항

❍ 8연동 시설하우스내에 저수조를 매립 시공하므로써 공간활용효과

및 월동기 동파위험없이 전천후 활용할수 있어효과 높음

❍ 센터내 설치 사업비집행시 공개입찰로 인한 기술이전업체와

직접계약이 어려워 조달청에 계약의뢰하면 사업지연이 많이 됨

- 특허기술부분이 차지하는 비율을 감안하여 계약방법메뉴얼 제공시

사업 적기 추진가능

❍ 저수조설치 공사시 농지에서도 개발제한구역에 관한법령

저촉사항발생 우려로 어려움 발생

- 관련법에 농업용수 활용목적의 빗물시설시 재배면적에 따른

저장탱크설치 가능토록 법령포함 제정건의 필요

❍ 비닐교체 작업 관련해서 개선이 필요하다.

- 설계개선 건의 등

5

성 과

시설원예의 안정적 농업용수확보로 자연순환형 채소 재배기술 보급

연간 약 750톤 농업용수 절감효과

6

금후계획

향후빗물 수집 및 저장후 수질상태 분석결과 선출

익년초에 시설작물 재배에 활용후 소득분석 및 지속홍보

붙임 : 1. 설문서 분석결과  1부.

2. 농촌진흥사업종합관리시스템(아티스)보고용 자료 1부.  끝.