문서번호	교통행정과-65021
결재일자	2016.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		교통시설팀장		교통행정과장		안전건설교통국장
김경원		방돈석		조덕현		전결 12/12 김재겸
협조
	재무과장		김성철
	계약팀장		김종수

★ ◉

- 2016년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가) -

설계변경(제2회) 시행 보고

2016. 12.

	성 동 구
	(교통행정과)

- 2016년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가) -

설계변경(제2회) 시행 보고

Ⅰ		공사 개요

❍ 공 사 명: 2016년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

❍ 위    치: 성동구 관내

❍ 공사기간: 2016. 3. 23. ~ 2016. 12. 31.

❍ 공사규모

- 교통안전표지 신설 76개, 교체 60개, 이설 3개

- 자전거우선도로표지 신설 67개 등

❍ 공 사 비: 57,060천 원

- 도급비 56,697천 원, 이전비 363천 원

❍ 계약상대자: 지오메탈(주) 대표 빈기환

Ⅲ		설계변경 내용

❍ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	금 액			비고
	당 초	변 경	증 · 감
총공사비	57,060,000	120,230,000	증) 61,170,000
도 급 비	56,697,000	120,230,000	증) 63,533,000
이 전 비	363,000	-	감) 363,000

❍ 설계변경 사유

- 주민 민원사항 등에 따른 목적물량 증 ‧ 감

- 공사시행(자전거우선도로, 아마존 등) 협조 요청에 따른 목적물량 증 ‧ 감

※ 관련 근거

1. 성수일로8,10길 생활권 도로정비 계획[안전관리과-7552호(2016.05.23.)]

2. 숭신,옥수초교 어린이보호구역 지정사업 시행계획[교통행정과-39402호(2016.08.02.)

3. 행당,옥수초교 스쿨존 개선사업 시행계획[교통행정과-39998호(2016.08.05.)]

4. 2016년 금북초등학교 아마존 조성공사 시행계획[교통행정과-45664호(2016.09.06.]

5. 둘레길 자전거우선도로 공사 시행계획[교통행정과-46375호(2016.09.07.)]

6. 성수이로7길 도로정비 사업계획[안전관리과-13243호(2016.09.08.)]

7. 노인보호구역 지정사업 시행계획[교통행정과-52050호(2016.10.12.)]

8. 자전거우선도로 설치공사 시행계획[교통행정과-55575호(2016.11.01.)]

❍ 주요 변경내용

- 교통안전표지 신설: 76개 → 161개,    - 교통안전표지 교체 : 60개 → 64개

- 자전거우선도로 표지: 67개 → 114개, - 이설 및 방향조정 물량 증·감

Ⅲ		조치 계획

❍ 공사 시행에 따른 변경사항에 대하여 상기와 보고 내용과 같이 설계변경 시행 후 준공처리하고자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 관련 근거 1부.

3. 설계변경 심사결과 1부.

4. 계약금액 조정 확인서 1부.