문서번호	도로보수과-12124
결재일자	2016.12.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
최병수		이석재	12/13 신응수
협조

2016년 포장도로 긴급복구공사

설계변경 검토보고(4회,최종)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부도로사업소

도로보수과

「2016년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)」

설계변경 시행계획(제4회,최종)

2016년 포장도로 긴급복구공사와 관련하여 시공물량 증․감에 따른 변경사항이 있어 아래와 같이 설계변경(4회,최종)을 시행코자 함.

1. 공사현황

○ 공 사 명 : 2016년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)-북부

○ 공사개요 : 소규모포장복구 86a, 절삭 덧씌우기 273a, 출동 80hr

○ 공 사 비 : 1,665,000,000원

- 도급비 1,289,263,000원, 관급비 366,408,000원, 이전비 9,329,000원

○ 공사기간 : 2016.02.19. ~ 2016. 12. 31.

○ 계약상대자 : *****************

2. 설계변경 사유

○ 포장 불량구간 정비에 따른 공종별 정비물량 조정

- 당초 : 소규모 포장복구 86a, 절삭 덧씌우기 273a, 출동 80hr

- 변경 : 소규모 포장복구 101a, 절삭 덧씌우기 306a, 출동 75hr

○ 주요 변경 내용

구 분	규격	단위	당초	변경	증․감	비고
소규모포장복구	야간,t=5cm	a	56	71	증 15
소규모포장복구	야간,t=10cm	a	6	3	감 3
소규모긴급복구	야간,t=20cm	a	24	27	증 3
절삭후덧씌우기	야간,t=5cm	a	258	306	증 48
절삭후덧씌우기	야간,t=10cm	a	8	0	감 8
포장장비 수송	포장장비이동	회	43	43	-

3. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		설계변경 금액		증․감	비 고
		당 초	변 경
총공사비		1,665,000,000	1,647,962,000	감)17,038,000
도급비	공급가액	1,172,057,273	1,232,290,910	증)60,233,637
	부 가 세	117,205,727	123,229,090	증)6,023,363
	계	1,289,263,000	1,355,520,000	증)66,257,000
관 급 비		366,408,000	283,113,000	감)83,295,000
이 전 비		9,329,000	9,329,000	-

4. 조치의견

○ 원가관리시스템 계약금액조정 검증결과 적정하게 산출되었으므로 상기 보고내용과 같이 설계변경 시행후 준공처리에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 변경설계서 1부.  끝.