문서번호	도로보수과-12122
결재일자	2016.12.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
최병수		이석재	12/13 신응수
협조

2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

설계변경(제3회,최종) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부도로사업소

도로보수과

설계변경(제3회,최종) 검토 보고

[2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사]

우리사업소에서 시행중에 있는 『2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)』에 대하여 시공물량 증․감에 따른 변경 사항이 있어 아래와 같이 설계변경 검토 내용을 보고 함.

공사현황

❍ 공 사 명 : 2016년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

❍ 공사개요 : 차선도색 276,718m,  차선제거 9,964m

❍ 공사기간 : 2016. 03. 08. ~ 2016. 12. 31.

❍ 계 약 자 : 태경건설  정 태 영

❍ 계약금액 : 금616,495,000원

관련근거

❍ 2016.12.12. : 감리업체(건영이앤씨) 설계변경서류 제출

설계변경 사유

❍ 노면표시 시공물량 증 ․ 감에 따른 공종별 수량 조정

설계변경 내용

❍ 공사비 변경

단위 : 원

구 분		설계변경 금액		증 ․ 감	비 고
		당 초	변 경
총공사비		903,650,450	1,099,522,850	증 195,872,400
도급액	공급가액	560,450,000	700,423,920	증 139,973,920
	부가세	56,045,000	70,042,390	증 13,997,390
	계	616,495,000	770,466,310	증 153,971,310
관급자재비		287,155,450	329,056,540	증 41,901,090

❍ 주요공정 변경 내역

공 종	규격	단위	당초	변경	증․감		비고
백색실선	수동식	m	31,263	29,801	감)	1,462
백색파선	수동식	m	33,415	39,762	증)	6,347
황색실선	수동식	m	26,268	37,734	증)	11,466
황색파선	수동식	m	22,068	22,047	감)	21
청색실선	수동식	m	10,635	276	감)	10,359
청색파선	수동식	m	11,386	886	감)	10,500
문자/기호	수동식	m	52,937	52,036	감)	901
횡단보도	수동식	m	88,746	119,537	증)	30,791
제 거	수동식	m	9,964	24,274	증)	14,310
합 계		m	286,682	326,353	증)	39,671

- 표지병 변경내역

공 종	종 류	당초	변경	증․감		비고
도로표지병 설치(개)	130×110×30	100	698	증	598
도로표지병 제거(개)	130×110×30	50	0	감	50
합 계		150	698	증	548

조치계획

❍ 원가관리시스템 계약금액조정 검증결과 적정하게 산출되었으며, 감리사로부터 제출된 설계변경 내역에 대하여 검토한 결과, 계약수량대비 시공물량 증․감 사항이 적정하므로 상기 내용과 같이 설계변경(3회,최종)을 시행코자 함.

따로붙임 : 변경설계서(3회) 1부.  끝.