문서번호	도로보수과-12121
결재일자	2016.12.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
최병수		이석재	12/13 신응수
협조

2016년 노후포장도로 교통안전시설(노면표시) 설치공사 설계변경(제1회,최종) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부도로사업소

도로보수과

설계변경(제1회,최종) 검토 보고

[2016년 노후포장도로 교통안전시설(노면표시) 설치공사]

우리사업소에서 시행중에 있는 『2016년 노후포장도로 교통안전시설(노면표시) 설치공사(연간단가)』에 대하여 시공물량 증․감에 따른 변경 사항이 있어 아래와 같이 설계변경 검토 내용을 보고 함.

공사현황

❍ 공 사 명 : 2016년 노후포장도로 교통안전시설(노면표시) 설치공사

❍ 공사개요 : 차선도색 125,400m,  도로표지병 500개

❍ 공사기간 : 2016. 04. 29. ~ 2016. 12. 31.

❍ 계 약 자 : ***************

❍ 계약금액 : 금303,448,470원

관련근거

❍ 2016.12.13. : *********** 설계변경서류 제출

설계변경 사유

❍ 노면표시 시공물량 증 ․ 감에 따른 공종별 수량 조정

설계변경 내용

❍ 공사비 변경

단위 : 원

구 분		설계변경 금액		증 ․ 감	비 고
		당 초	변 경
총공사비		476,643,470	605,235,360	증 128,591,890
도급액	공급가액	275,862,246	349,636,364	증 73,774,118
	부가세	27,586,224	34,963,636	증 7,377,412
	계	303,448,470	384,600,000	증 81,151,530
관급자재비		173,195,000	220,635,360	증 47,440,360

❍ 주요공정 변경 내역

공 종	규격	단위	당초	변경	증․감		비고
백색실선	수동식	m	9,000	17,103	증)	8,103
백색파선	수동식	m	20,000	21,971	증)	1,971
황색실선	수동식	m	22,800	53,223	증)	30,423
황색파선	수동식	m	7,300	11,493	증)	4,193
청색실선	수동식	m	8,600	3,954	감)	4,646
청색파선	수동식	m	2,400	381	감)	2,019
문자/기호	수동식	m	21,300	28,549	증)	7,249
횡단보도	수동식	m	34,000	41,838	증)	7,838
합 계		m	125,400	178,512	증)	53,112

- 표지병 변경내역

공 종	종 류	당초	변경	증․감		비고
도로표지병 설치(개)	130×110×30	200	0	감	200
도로표지병 제거(개)	130×110×30	300	0	감	300
합 계		500	0	감	500

조치계획

❍ 원가관리시스템 계약금액 검증 확인결과 적정하였으며, 감리사로부터 제출된 설계변경 내역에 대하여 검토한 결과 이상 없으므로, 상기 보고 내용과 같이 시공물량 증 ․ 감에 따른 설계변경(1회,정산)을 시행코자 함.

따로붙임 : 변경설계서(1회) 1부.  끝.