문서번호	설비부-19519
결재일자	2016.12.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박기범		임현근	12/13 代유병기
협조

『도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치 전기공사』

공사기간(총차,1차) 연장 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

도시기반시설본부

설 비 부

『도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치 전기공사』

공사기간(총차,1차) 연장 검토 보고

『도시고속도로 연결램프(정릉길) 전기공사』관련 책임건설사업관리기술자의 공사기간 연장 보고 내용을 검토하여 보고드림

Ⅰ		공사현황

▢ 공 사 명 : 도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치 전기공사

▢ 공사규모 : 연결램프(L=533m, 램프교 120m)

가로등 및 신호등 이설 / 램프구간 가로등,점검등 신설

▢ 공사기간 : 2015. 02. 13. ~ 2016. 12. 30.

▢ 공 사 비 : 169백만원(도급 168백만원 / 이전비 1백만원)

▢ 감 리 단 : 극동엔지니어링㈜ 외 1개사

▢ 시 공 사 : ㈜성강통신기술사사무소

Ⅱ		관련근거

▢ 전기공사(총차,1차) 공사기간 연장 검토 보고 (극감정릉 제16-185호)

Ⅲ		공사기간(총차,1차) 연장 검토내용

▢ 공사기간 연장사유

○ 총 차 : 전체 사업기간 연장으로 전기공사 공사기간 연장

○ 1 차 : 선행공종(토목공사)의 지연으로 전기공사 실 착공 시기 미도래로 인한 공사기간 연장

▢ 공사기간 조정 (계약금액 변경 없음)

구분	당 초	변 경	비 고
총차	2015. 02. 13. ~ 2016. 12. 30.	2015. 02. 13. ~ 2017. 12. 29.	364일 연장
1차	2015. 02. 13. ~ 2016. 12. 30.	2015. 02. 13. ~ 2017. 02. 28.	60일 연장

▢ 연장사유 귀책소재 : 도시기반시설본부

▢ 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 감리원 검토 의견

○ 사업기간 연장으로 총차 전기공사 공사기간 연장이 타당 함.

○ 1차 공사기간은 시공시기 미 도래로 인하여 공사기간 연장이 타당 함.

Ⅳ		보고자 의견

▢ 사업기간 연장에 따른 공사기간 변경 건으로 책임건설사업관리기술자의 검토보고가 타당한 것으로 판단되므로 총차 및 1차분 공사기간을 변경(연기) 조치하여 당초 계획한 공사 추진에 만전을 기하고자 함.

붙 임: 건설사업관리기술단 공문 1부.   끝.