투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	관급자재(아스콘, PSMA) 변경구매 및 납품기한 연기요청

우리 사업소에서 시행중에 있는 「2016년 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)」에 소요되는 아스콘을 변경구매 및 납품기한 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

◦ 요청 사항

연번	계약건명	계 약 번 호	품 명	단위	수 량		납 품 기 한		변경 사유	비고
					당초	변경	당초	변경
1	아스콘구매	12161066700	PSMA T13mm	톤	694	415	11.30	12.23	설치물량 증 가

◦ 납품기한 연기사유 : 동절기 온도 급강하 및 폐기물 반출의 어려움 등으로

포장작업 지연.  끝.

	도로보수과장
주무관	이기영		도로보수과장	12/13 이상호
협조자
시행	도로보수과-6264	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41	/
전화	2210-1538	/전송	2210-1549	/		/	대시민공개