건설공사 설계변경 사전심의 의견서

부분공개(7)

1. 공사명 : 거마가압장 ~ 군부대간 송배수관 정비공사

신청부서명	급수운영과
작 성 자	이 덕 규
제 출 일	2016. 12. 13

2. 심의 위원회 의견

- 심의일시 : 2016. 12. 13(화)

- 심의의견 : 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여 아래와 같이	의견을 제시함.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

급수운영과장

전명수

12/13

전명수

타당함

위    원

주무관

송종범

송종범

타당함

위    원

주무관

김효수

김효수

타당함

위    원

주무관

임인택

임인택

타당함

위    원

주무관

한호진

한호진

타당함

위    원

주무관

김용현

김용현

타당함

담    당

주무관

이덕규

이덕규

설계 변경 심의 설명서

❑ 공사현황

○ 공 사 명 : 거마가압장~군부대간 송배수관 정비공사

○ 공사개요 : D=700mm, L=1,100m

○ 도 급 비 : 1,188,783,490원

○ 공사기간 : 2016.05.10 ～ 2016.12.19

○ 도 급 자 : 창준이엔지(주) 대표 임현우 외 1개사

○ 감 리 자 : 서울특별시시설관리공단  기철주

❑ 설계변경 주요내용

○ 현장검토보고에 의한 변경사항

- 기존관(D300) 임시철거 및 재설치

[공사감독2처-13601(2016.10.17) → 급수운영과-19570(2016.10.17)]

- 강관보호공 설치

[공사감독2처-16549(2016.11.25) → 급수운영과-22522(2016.11.30)]

- 강관 용접부 품질시험(RT, MT) 비용 반영

[공사감독2처-16756(2016.11.29) → 급수운영과-22449(2016.11.29.)]

○ 기타 정산사항

- 건강보험료, 노인장기요양보험료, 연금보험료, 퇴직공제부금등 실 납부금액으로 정산

- 신규공종 발생 반영[아스팔트 포장절단(100~150mm) 외 69개 공종]

○ 실시공 (주요)수량 정산

공종명	규격	단위	수 량		비고(증,감)
			계 약	변 경
강관 부설(주+야간)	D700mm	m	1,033	981	감) 52
강관 접합(주+야간)	D700mm	m	286	274	감) 12
터파기(주+야간)	(인력+기계)	㎥	6,284	5,158	감) 1,126
구형밸브실 설치	D500~D700	개소	6	9	증) 3
제수밸브 설치	D500~700	개소	2	3	증) 1

❑ 공사비 변경 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액		비 고 (증·감)
	당 초	변 경
도 급 비	1,188,783,490	1,041,920,000	감) 146,863,490
공급가액	1,080,712,264	947,200,000	감) 133,512,264
부가가치세	108,071,226	94,720,000	감) 13,351,226

붙  임 : 설계변경내역서 1부.  끝.