투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재(콘크리트잔디블록 등 5종) 납품기한 연기 및 수량 변경요청(재사용플라자건립공사)

1. 방재시설부-17842(2016.11.14.)호와 관련입니다.

2. 우리부에서 시행 중인「재사용플라자 건립공사」에 소요되는 자재(콘크리트 잔디블록 등 5종)의 납품기한 연기 및 수량 변경을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 납품기한 연기 내역

연번	계약번호 (납품요구번호)	단위	품명	수 량			납품기한		비고
				계약	검수	잔량	당 초	변 경
1	38153126005 (12-16-1-61842-00)	개	콘크리트잔디블록	113	-	113	2016년 12월30일	2017년 03월14일
2	22153243515 (12-16-1-61843-00)	㎡	콘크리트블록 풋노츠	9	-	9
3		㎡	콘크리트블록 t60㎜	389	-	389
4		㎡	콘크리트블록 t60㎜, 투수	447	-	447
5	00158099303 (12-16-1-61844-00)	㎡	목재판재 말라스	1,364	-	1,364

- 연기사유 : 소요자재 투입시기 조정

나. 납품수량 변경 내역

연번	계약번호 (납품요구번호)	단위	품명	수 량		금액		비고
				변경전	변경후	변경전	변경후
1	22153243515 (12-16-1-61843-00)	㎡	콘크리트블록 풋노츠	9	16	351,000	624,000	납품기한 ’17.3.14

- 변경사유 : 현장여건상 원활한 통행로 확보를 도모

붙임 : 관급자재 납품기한 연기 요청 1부.  끝.

	방재시설부장
★주무관	송석범		조경시설과장	신용우		방재시설부장	12/13 임춘근
협조자
시행	방재시설부-19762	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 플리미어플레이스빌딩 14층 도시기반시설본부 방재시설부	/
전화	02-3708-8796	/전송	02-3708-8756	/		/	부분공개(5)