함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(뚝도 배출수처리장 감시제어시스템 제작 구매)

1. 생산관리과-10026호(’16.12.06.) 및 한국종합 2016-12-162호(’16.12.05.)와 관련입니다.

2. 우리부에서 시행하고 있는 『뚝도 농축조 증설 및 개량공사』건의 설계변경(1회)을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 건    명 : 뚝도 배출수처리장 감시제어시스템 제작 구매

나. 납품기한 : ‘16. 12. 31

다. 계약금액 : 395,627,800원

라. 계 약 자 : (주)누리제어시스템

마. 예산과목 : 자본적지출,(뚝도정수센터농축조증설및개량),시설비및부대비(시설비)

사. 설계변경 내역

1) 계약물량 변경 내역

연번	변 경 사 항		계약금액 증·감 (천원)
1	배출수처리장 RCS제어반	전원보호용 SPD 1→11 (증10개)	증) 8,083
2	계측기기	유량계 (초음파→파샬프롬)	감)13.822
3	계측기기(외함)	계측기 외함 4→5 (증1개)	증) 596
4	감시제어 케이블 및 배관	- 송수유량계 전원 통신 배관 이설 - 슬러지저류조 이송유량계 케이블 이설	증) 5,143
	합 계		증) 0

2) 계약금액 및 납품기한 : 변동없음

아. 설계변경 사유(물량조정)

- 정수장 현장 여건 고려 및 시설운영관리를 위한 정수센터 요구사항 등을 반영

붙임 : 1. 설계변경 검토 보고 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

주무관	임은비		기전설비과장	서대훈		생산부장	12/12 구자훈
협조자	주무관	김성민
시행	기전설비과-10159	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동) 서울시 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1334	/전송	02)3146-1319	/		/	대시민공개