“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	(재)홍대 걷고싶은거리 문화관광 명소화 건설 폐기물 운반·처리 용역 계약 변경 의뢰

1. 관광정책과-15599(2016.12.7.)호 및 재무과-61656(2016.12.9.)호와 관련입니다.

2. 시행 중인 홍대 걷고싶은거리 문화관광 명소화 건설 폐기물 운반·처리 용역의 설계변경을 아래와 같이 시행코자 이호조 처리를 완료하고 계약변경을 의뢰하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 홍대 걷고싶은거리 문화관광 명소화 건설 폐기물 운반·처리

나. 기    간 : ’16.10.21 ~ ’16.12.20

다. 사 업 비 : 21,851,000원

라. 예산과목 : 관광사업과, 서울만의 특화관광자원을 활용한 서울관광 활성화, 서울
강점 특화관광 콘텐츠 확충, 서울 매력명소 관광자원 개발 활용, 시설비

마. 설계변경내역

구 분	변 경 내 용
폐기물 운반·처리량	당 초	- 폐아스콘 : 112.85ton - 건설폐재류 : 590.75ton - 혼합폐기물 : 3.5ton
	변경후	건설폐재류 : 858.88ton
	초과수량	건설폐재류 : 268.13ton
계약금액	당 초	21,851,000원
	변경후	30,553,000원
	증 액	8,702,000원

바. 설계변경사유

- 굴착지의 콘크리트 기초가 예상보다 두꺼워 건설 폐기물의 예측수량 초과

- 건설 폐기물의 수량이 초과함에 따른 처리 및 운반 비용 등 증액

붙  임 : 1. 설계변경계획 방침 1부.
2. 합의각서 1부.
3. 설계내역서 1부. 끝.

	관광정책과장
주무관	김보경		지역관광진흥팀장	권영문		관광정책과장	12/12 代조성호
협조자
시행	관광정책과-15780	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	2133-2817	/전송	2133-1067	/	megbkkim@seoul.go.kr	/	부분공개(6)