문서번호	시설보수과-10601
결재일자	2016.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설보수과장	북부도로사업소장
홍정식	정재현	12/12 신응수

공사 설계변경(제4회, 최종) 시행 보고

(2016년 도로시설물 일상유지보수공사)

2016. 12.

북부도로사업소

(시설보수과)

공사 설계변경(제4회, 최종) 시행 보고

(2016년 도로시설물 일상유지보수공사)

『2016년 도로시설물 일상유지보수공사』 작업지시에 대한 신규공종,  물량 변경(증·감)사항을 반영하여 설계변경(제4회, 최종) 시행코자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2016년 도로시설물 일상유지보수공사

○ 공사기간 : 2016. 3. 25. ～ 2016. 12. 31.

○ 계 약 자 : 정상개발(주) 대표 정동우

○ 총공사비 : 2,948,000,000원

- 도급비 2,784,650,000원, 관급비 147,350,000원, 이전비 16,000,000원

○ 공사규모 : 균열보수 81m, 표면보수 8,744㎡, 단면보수 1,324㎡, 신축이음교체 149m

□ 주요 설계변경 사항

○ 작업지시(38~40차) 신규공종 및 물량 변경(증ㆍ감)사항 반영

작업지시		내 용	비고
38차	시설보수과-9880(2016.11.21.)	- 겨울철 대비 조치 ㆍ 결빙주의 간판 설치(화랑고가 12개) ㆍ 미끄럼주의 간판 설치(지하차도 8개소, 15개) ㆍ 미끄럼방지 매트 설치(세운교 44m, 나래교 23m) ㆍ 월계2,3지하차도 배수로 고무매트 설치 1,161m
39차	시설보수과-10006(2016.11.23.)	- 겨울철 대비 지하차도(창동,녹천,하계) 열선 및 유도배수판 설치(열선 1,201m, 유도배수판 79㎡)
40차	시설보수과-10395(2016.12.7.)	- 겨울철 대비 도로시설물 안전점검 지적사항 조치 (월계1교 등 17개 시설물)

○ 제경비, 관급자재, 이전비 정산

□ 세부 변경내용

○ 주요 공종 물량(증ㆍ감) 변경 내역

공 종	단위	당 초	변 경	증․감	비고
콘크리트 단면보수	㎡	1,324	1,421	증)97
콘크리트 표면보수	㎡	8,744	8,374	감)370
유도배수판 설치	㎡	100	121.8	증)21.8
열선 설치	m	1	1,201	증)1,200
터널 점검통로 안전난간 설치	m	-	1,427	증)1,427	신규

○ 공사비 변경(증ㆍ감) 내역

구 분	당 초	변 경	증․감	비고
총공사비	2,948,000,000원	2,925,215,930원	감)22,784,070원
도 급 비	2,784,650,000원	2,774,640,000원	감)10,010,000원
이 전 비	16,000,000원	10,000,500원	감)5,999,500원
관 급 비	147,350,000원	140,575,430원	감)6,774,570원

○ 예산과목

- 도시개발특별회계, 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리, 교량시설물 일상유지보수,       시설비(1,000,000,000원)

- 도시개발특별회계, 도로시설과, 도로시설관리, 터널시설관리, 도로시설물(터널,복개,       지하차도,세척)일상유지보수, 시설비(1,948,000,000원)

□ 조치의견

○ 상기 보고 내용과 같이 금회 설계변경(제4회, 최종)은 작업지시(38~40      차)에서 발생하는 신규공종 및  물량변경(증ㆍ감)사항, 기타 제경비, 관      급자재, 이전비 정산을 반영 한 것으로 예산 범위내에서 설계변경(제4      회, 최종) 시행코자 함.

따로붙임 : 1. 설계변경(제4회, 최종) 내역서 1부.

2. 제비율 검증(설계변경 제4회, 최종) 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.