투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(제4회, 최종) 시행 - 2016년 도로시설물 일상유지보수공사

1. 시설보수과-10601(2016.12.12.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 공사 시행중에 있는 『2016년 도로시설물 일상유지보수공사』에 대한 설계변경(제4회, 최종)을 아래와 같이 시행코자 합니다.

○ 공 사 명 : 2016년 도로시설물 일상유지보수공사

○ 공사기간 : 2016. 3. 25. ~ 2016. 12. 31.

○ 도 급 자 : 정상개발(주) 대표 정동우

○ 변경사유

- 작업지시에 따른 신규공종 및 작업물량 변경(증·감) 반영

- 제경비, 관급자재비, 이전비 정산

○ 변경내역(제4회, 최종)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감
총공사비	2,948,000,000원	2,925,215,930원	감)22,784,070원
도 급 비	2,784,650,000원	2,774,640,000원	감)10,010,000원
이 전 비	16,000,000원	10,000,500원	감)5,999,500원
관 급 비	147,350,000원	140,575,430원	감)6,774,570원

○ 예산과목

- 도시개발특별회계, 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리, 교량시설물 일상유지보수, 시설비(1,000,000,000원)

- 도시개발특별회계, 도로시설과, 도로시설관리, 터널시설관리, 도로시설물(터널, 복개, 지하차도, 세척)일상유지보수, 시설비(1,948,000,000원)

따로붙임 : 1) 공사 설계변경(제4회, 최종) 시행 보고 1부.

2) 설계변경(제4회, 최종) 내역서

3) 제비율 검증(설계변경 제4회, 최종) 1부.

4) 합의각서 1부.  끝.

주무관	홍정식		시설보수과장	정재현		북부도로사업소장	12/12 신응수
협조자
시행	시설보수과-10603	(		)	접수		(		)
우	01137	서울 강북구 한천로 913	/	www.seoul.go.kr
전화	944-5451	/전송	944-5459	/		/	대시민공개