문서번호	도로계획과-17895
결재일자	2016.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
전문관		도로시설계획팀장		도로계획과장
이성주		국중진		12/12 하종현
협 조

내부순환로(월곡IC)구조개선 타당성조사 용역

설계변경 및 준공기한 연기 검토 보고

2016. 12.

안전총괄본부

(도로계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

내부순환로(월곡IC)구조개선 타당성조사 용역

설계변경 및 준공기한 연기 검토 보고

1		용역 개요

○ 용  역  명 : 내부순환로(월곡IC)구조개선 타당성조사 용역

○ 계  약  자 : ㈜동해종합기술공사

○ 계약 금액 : 금57,825,600원(금오천칠백팔십이만오천육백원)

○ 계약년월일 : 2016. 04. 15.

○ 착수년월일 : 2016. 04. 19.

○ 준공예정일 : 2016. 12. 15.

2		설계 변경

○ 설계변경 사유

- 내부순환로와 북부간선도로 직결체계 요구에 따라 월곡IC 진출차량
방향별 구체적 교통량 파악을 위한 번호판조사 등 교통조사비 추가

※ 내부순환로 북부간선 직결요구 이승로의원 시정질의와 관련임

○ 당초 57,825,600원 → 변경 73,128,000원(증 15,302,400원)

구 분			금 액	증 · 감
총 용 역 비		당 초	57,825,600	증 15,302,400
		변 경	73,128,000
공급가액	타당성조사비	당 초	40,112,068	-
		변 경	40,112,068
	교통분석비	당 초	9,464,694	증 13,765,149
		변 경	23,229,843
손해배상공제료		당 초	264,838	증 146,251
		변 경	411,089
부가가치세		당 초	4,984,000	증 1,391,000
		변 경	6,375,000
설계자문비		당 초	3,000,000	-
		변 경	3,000,000

3		준공기한 연기

○ 추가 교통현황 조사를 위한 준공기한 연기 필요

가. 준공기한

- 당  초 : 2016. 12. 15.

- 변  경 : 2017. 02. 15.

나. 연기 귀책사유 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 내부순환로와 북부간선로의 직격연결 체계 요구에 따른 월곡IC의 구체적 방향별 교통량 조사를 위한 추가 과업기간 필요

4		조치 계획

○ 추가 교통현황 조사·분석을 위해 설계변경 및 추가 과업 시행에 따른 준공기한을 연기하여 용역 시행에 만전을 기하고자 함.

○ 향후 추진계획

- 2016. 12.  : 번호판조사, 교통수요 예측

- 2017. 01.  : 지역 시의원 설명, 주민설명회 실시

- 2017. 02   : 최종보고, 용역준공

․ 타당성 검증 실시, 투자심사

붙임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.