함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	변경계약의뢰(장위동230-206~238-97호간외 3개소 배급수관 정비공사)

1.우리사업소에서 서울특별시시설관리공단에 위탁 감독의뢰하여 시행중인『장위동230-206~238-97호간외 3개소 배급수관 정비공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행하고 계약의뢰 합니다.

가. 공 사 명 : 장위동230-206~238-97호간외 3개소 배급수관 정비공사

나. 도 급 자 :**************

다. 공사기간 : 2016.04.20.~2016.12.16

라. 설계변경내용 : 물량증감 및 신공종발생

마. 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(노후상수도관교체)    (단위 : 원)

구분	계약금액(당초)	계약금액(변경)	증 감	비고
도급비	616,600,900	666,556,000	증) 49,955,100
공급가액	560,546,273	605,960,000	증) 45,413,727
부가세	56,054,627	60,596,000	증) 4,541,373

붙임 : 1. 설계변경 내부품의서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 제비율 검증 1부.

4. 합의서 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이연한		주무관	한상근		시설관리과장	12/12 이경재
협조자
시행	시설관리과-37830	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02-3146-2205	/전송	02-3146-2239	/	wakeup73@seoul.go.kr	/	부분공개(6)