투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경 계약 - 관급자재 납품기한 연기요청(레미콘)-한강공원나들목 증설공사(개화)

1. 치수과-4339(2016.12.12.)호와 관련입니다.

2. 치수과에서 추진중인 ｢한강공원 나들목 증설공사(개화)｣ 관급자재에 대해 아래와 같이 기간변경 요청이 있어 변경계약하고자 합니다.

가. 기간변경 요청내역

물품분류 번 호	품 명	규 격	단위명칭	수량	납 품 기 한		비 고
					변경전	변경후
30111505 (10063106)	레미콘	25-27-150	㎥	360	2016.12.31	2017.05.31	사용시기 미도래

나. 납품요구번호 : 12-16-1-49141-00

다. 계약번호 : 12161059001.  끝

붙  임 : 변경요청 공문 1부.  끝.

주무관	최유섭		총무과장	12/12 박병현
협조자
시행	총무과-21979	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257, 한강사업본부 총무과 (성수동1가 642-25번지)	/
전화	3780-0713	/전송	3780-0740	/	yschoi21@seoul.go.kr	/	부분공개(5)