함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	물품 변경 계약 체결 (뚝도 배출수처리장 감시제어시스템 제작구매)

1. 기전설비과-10159(2016. 12. 12.)호 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 ‘뚝도 배출수처리장 감시제어시스템 제작구매 계약’을 아래와 같이 변경하여 계약을 체결하고자 합니다.

가. 계약건명 : 뚝도 배출수처리장 감시제어시스템 제작구매

나. 계약업체 : ********

다. 계약금액 : 395,627,800원

라. 변경내용 : 계약물량 변경

연번	변 경 사 항		계약금액 증·감 (천원)
1	배출수처리장 RCS제어반	전원보호용 SPD 1→11 (증10개)	증) 8,083
2	계측기기	유량계 (초음파→파샬프롬)	감)13.822
3	계측기기(외함)	계측기 외함 4→5 (증1개)	증) 596
4	감시제어 케이블 및 배관	- 송수유량계 전원 통신 배관 이설 - 슬러지저류조 이송유량계 케이블 이설	증) 5,143
	합 계		증) 0

마. 변경사유 : 정수장 현장 여건 고려 및 시설운영관리를 위한 요구사항 반영

따로붙임 : 변경계약 합의서 및 내역서 각 1부. 끝

주무관	황한범		재무회계과장	박병식		요금관리부장	12/12 박병만
협조자
시행	재무회계과-17716	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1243	/전송	02-3146-1209	/	h2sb@seoul.go.kr	/	부분공개(5)