투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	변경계약의뢰(제3처리장 침전지 벽체 표면보수공사)

1. 시설보수과-7175(2016.12.12)호와 관련입니다.

2. 우리센터에서 추진중인 『제3처리장 침전지 벽체 표면보수공사』에 대하여 아래와 같이 변경 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 제3처리장 침전지 벽체 표면보수공사

나. 공사개요 : 표면보수 4,591㎡, 기타부대공 1식

다. 공사기간 : 2016.11.11~2016.12.15

라. 공 사 비 : 230,329천원

마. 도 급 자 : ㈜보광티앤씨 대표 윤채호

바. 변경현황

구 분		당 초	변 경	증 • 감	비 고
총공사비		230,329,000	221,400,000	감 8,929,000
도급비	공급가액	209,390,000	201,272,728	감 8,117,272
	부 가 세	20,939,000	20,127,272	감 811,728
	계	230,329,000	221,400,000	감 8,929,000

사. 변경사유 : 제경비 보험료 정산에 따른 변경

아. 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리, 중랑                         물재생센터 공통분야 유지보수, 시설비및부대비, 시설비

붙임 : 방침서 및 설계변경 내역서 1부.    끝.

	시설보수과장
주무관	최승룡		시설보수과장	12/12 윤승범
협조자
시행	시설보수과-7177	(		)	접수		(		)
우	04809	성동구 자동차3길 64	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2572	/전송	02-2211-2579	/	csy21@seoul.go.kr	/	대시민공개