부 장	12/12 박동룡		과 장	代박종덕	심사자	서현준	설계자	박종덕		설 계	심 사		결 재
										2016년12월 일	2016년12월 일
변 경 설 계 서(총괄 1회)
용 역 명 : 신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역 4공구(총괄 1회)
구 분					당 초				변 경			증.감		비 고
총 용 역 비					2,470,000,000				2,474,950,000			증) 4,950,000		물가변동 반영 및 감리원 투입계획 변경
도급비		공 급 가 액			2,217,980,000				2,217,980,000			-
		물 가 변 동			-				4,500,000			증) 4,950,000
		소 계			2,217,980,000				2,222,480,000			증) 4,950,000
		부 가 가 치 세			221,798,000				222,248,000			증) 450,000
		손 해 배 상 공 제 료			30,222,000				30,222,000			-
		계			2,470,000,000				2,474,950,000			증) 4,950,000
< 용역개요 > ○ 총연장 : 2,471m (정거장 3개소, 본선환기구 1개소) ○ 감리기간 : 당초) 2011. 11. 01 ~ 2021. 04. 17 변경) 2011. 11. 01 ~ 2021. 09. 07