투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	설계용역 준공기한 연장에 따른 변경계약 요청

1. 생태공원과-3968호(2016.12.12)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 추진 중인 ｢여의도샛강 합류부 생태거점 조성사업 소규모   환경영향평가 용역｣과 관련하여, 아래와 같이 준공기한 연장코자 하오니 변경계약 조치하여   주시기 바랍니다.

가. 용역 개요

- 용 역 명 : 여의도샛강 합류부 생태거점 조성사업 소규모 환경영향평가 용역

- 용역기간 : 2016. 7. 19 ~ 12. 15

- 용 역 비 : 75,155천원

- 용 역 사 : 이엔씨기술(주)

나. 준공기한 연장 : 4개월(126일) 연장

구 분	용 역 기 간	용역비	비고
당 초	2016. 7. 19 ~ 12. 15	변동없음
변 경	2016. 7. 19 ~ 2017. 4. 20

다. 귀책소재 및 지체상금 부과 여부

- 귀책소재 : 한강사업본부

- 지체상금 : 미부과.

붙임 : 준공기한 연장 검토보고서(방침서) 1부. 끝.

	생태공원과장
★주무관	김대호		생태공원과장	전결 12/12 최병언
협조자
시행	생태공원과-3978	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02)3780-0631	/전송	02)3780-0745	/	wood91@seoul.go.kr	/	대시민공개