투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(1공구) 변경계약 의뢰

1. 도시철도사업부-11424호(2016.12.09)와 관련입니다.

2. 신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(1공구)과 관련하여 물가변동(제1회)으로 인하여 아래와 같이 변경계약 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(1공구)

나. 계 약 자 : ㈜동부엔지니어링외 2개사

다. 용역기간

구 분	당 초	변 경	비 고
총 괄	2011.11.01 ~ 2021.04.17	2011.11.01 ~ 2021.09.07	투입계획 조정 (143일)
1 차	2011.11.01. ~ 2017.04.30	2011.11.01 ~ 2017.09.19

라. 용역금액 조정 내역                             (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	사 유
총괄 (1회)	2,739,510,000	2,745,120,000	5,610,000	- 계약금액 : 변경 증) 5,610,000 - 사 유 ․ 물가변동분 반영
1차 (2회)	376,000,000	376,000,000	변경없음	- 계약금액 : 변경없음 - 사 유 ․ 물가변동 반영 증) 5,610,000 ․ 투입계획 조정 감) 5,610,000

마. 예산과목 : 신교통수단도입, 경전철건설사업,신림선 경전철건설(건설), 시설비 및 부대비, 감리비(특별회계 376,000천원)

첨 부  1) 계약금액 조정 검토보고서 1부

2) 감리변경 설계서(총괄1회 및 1차2회) 1부.

3) 변경설계서(총괄1회) 1부.

4) 변경설계서(제1차2회) 1부.

5) 합의각서 1부 . 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	강창묵		경전철2과장	최광무		도시철도사업부장	12/12 박동룡
협조자	주무관	임병길		계약2팀장	양주춘
시행	도시철도사업부-11483	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동96) 프리미어플레이스빌딩 서울시 도시기반시설본부	/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7178	/전송	02-772-7304	/	gang0211@seoul.go.kr	/	부분공개(5)