문서번호	도로보수과-6280
결재일자	2016.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	도로보수과장
김용면	12/14 이상호

맨홀 정기점검

조사물량 추가 및 작업기한 연기 검토 보고

2016. 12.

성동도로사업소

(도로보수과)

·

맨홀정기점검 조사물량 추가 및 작업기한 연기 검토보고

『2016년 관내 포장도로 불량맨홀정비공사』맨홀정기점검

조사물량 추가 및 작업기한 연기 검토 보고임.

□ 공사개요

○ 공  사  명  : 2016년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2016. 4. 4 ~ 2016.12.30

○ 계  약  일  : 2016. 4. 4

○ 도  급  자  : ㈜우암건설 대표 고원준

○ 도 급 비  : 636,823,000원

□ 보고내용

○ 맨홀정기점검(불량맨홀 조사) 작업지시에 대하여 현장조사 결과 불량맨홀이

추가 조사되어 작업지시사항에 반영토록하고 이에 따른 내업(전산입력)작업

등 기간소요로 작업기한 연기 불가피

【맨홀 정기점검】

- 작업지시일 : 2016. 10.06

- 작업기간 : 당초 2016.10.07.~ 12.15, 변경 2016.10.07 ~ 12.23

- 연기사유 : 불량맨홀 추가조사물량 및 내업작업

- 작업지시 내용 : 불량맨홀 점검 당초 3,100개소 → 변경 3,600개소

□ 조치의견

○ 위 내용과 같은 사유로 인해 작업기한 연기가 불가피한 실정임으로 작업기간을 변경승인하고자 하며 추가 조사물량에 대하여 추후 설계변경 반영코자 함.