보  고  서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	송여진	이경희	12/14 최철민

제 목 : 급수공사 연기 보고

=============================================================

명에 의하여  급수공사 업무수행 중 신청인으로부터 공사기한 연기요청이 있어 다음과 같이 검토결과를 보고합니다.

▢ 현    황

신청인	위 치	지시번호	공사기간	공사개요	비 고
***	***************	신설-214	2016.11.18.~12.10.	신설 D40mm*1전	급수운영과-26889 (2016.11.18.)

▢ 보고 내용

○ 당초 12월 10일경으로 급수공사 연기신청 하였으나, 현재 건축 공사현장의 공사 준비 미흡 사유로

○ 신청인으로부터 급수공사 재연기신청이 접수되어 부득이 급수공사 준공기한 연기가 필요한 실정임.

▢ 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 조치 의견

○ 위와 같은 실정으로 아래의 기간까지 연기하여 급수공사 업무수행에 만전을 기하고자 합니다.

작업지시 번호	당초 작업기간	변경 작업기간	비 고
신설-214	2016.11.18. ~ 2016.12.10.	2016.11.18. ~ 2016.12.30.

붙임  준공 연기원 1부(따로 붙임).  끝.