문서번호	설비부-19570
결재일자	2016.12.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
김현숙	김영수	12/14 代유병기

『시립영보정신요양원 증축 및 리모델링 통신공사』

준공기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.12

설비부

「시립영보정신요양원 증축 및 리모델링 통신공사」

준공기한 연기 검토보고

「시립영보정신요양원 증축 및 리모델링 통신공사」의 준공기한 연기를 위한 검토보고임.

사업개요

□ 사 업 명 : 시립영보정신요양원 증축 및 리모델링 통신공사

□ 위    치 : 경기도 용인시 처인구 묵리 464번지 외 8필지

□ 공사기한 : 2017.03.01.

관련근거

□ 대광제2016-120801호(2016.12.08.) <공기연장 건>

변경내용

□ 준공기한 연기

구 분	도급사	계약금액	준공기한		비 고
			당초	변경
통신공사	대광정보시스템(주)	210,681,620원	2017.03.01.	2017.03.21.

□ 연기사유 : 선행공정(건축)이 연기되어 통신공사도 연기하려고 함.

검토내용

□ 선행공정 연기로 인한 사항이므로 본 건은 적합한 것으로 판단되며, 건설총괄부에        준공기한 연기(변경계약)를 의뢰할 예정입니다.

붙임 : 1. 합의서 1부.

2. 시공사 공문 1부.  끝.