등록번호	안전치수과-27070		주무관		하수팀장		안전치수과장		안전건설국장
등록일자	2016.12.13.
			연재훈		박종하		신대식		전결 12/14 이우룡
결재일자	2016.12.14.
공개구분	대시민공개
			협조
『필동배수분구 침수방지사업 전면책임감리용역』 준공기한 연기 및 설계변경 검토보고(총차2회, 4차)
안전건설국 안전치수과

『필동배수분구 침수방지사업 전면책임감리용역』

준공기한 연기 및 설계변경 검토보고(총차2회, 4차)

우리구에서 시행중인 『필동배수분구 침수방지사업 전면책임감리용역』과 관련 준공기한 연기 및 설계변경 사유가 발생하여 아래와 같이 검토하여 보고하는 사항임.

Ⅰ		용역개요

용 역 명 : 필동배수분구 침수방지사업 전면책임감리용역

용역기간 : 2013.4.1.~2017.3.31.(4차 ‘16.3.1.~12.31)

총용역비 : 총차 1,383,060천원(4차 330,000천원)

용역규모 : 하수관(암)거 정비 L = 13,290m

용역업체 : ㈜삼안 외 1 대표 최동식 외 1

Ⅱ		연차별 사업비 현황

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2016년	2017년	2018년
계	34,400	15,118	5,000	6,000	8,282
설 계 비	874	874	-	-	-
시 설 비	31,732	13,480	4,670	5,660	7,922
감 리 비	1,794	764	330	340	360

Ⅲ		준공기한 연기

연기사유

『필동배수분구 하수관로 종합정비사업』 사업기간이 2018. 12. 31.까지 연장계획에 따라 감리 용역기간을 공사일정에 맞춰 연기

용역기간

- 당  초 : 2013. 4. 1. ~ 2017. 3. 31(48개월)

- 변  경 : 2013. 4. 1. ~ 2018. 12. 31(58.77개월)

감리비 변경 현황

- 당  초 : 1,383,060천원

- 변  경 : 1,775,600천원(증: 392,540천원, ESC 44,191천원 포함)

Ⅳ		설계변경 검토내용

설계변경 사유

- 물가변동에 의한 물가상승비 반영(용역계약 : 2013년)

- 사업기간 연장에 따른 감리 용역기간 연장

감리비 증·감 내역

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
직접인건비	451,665,720	560,169,324	108,503,604
2. 제경비	280,936,077	348,425,319	67,489,242
3. 기술료	51,279,020	63,578,965	12,299,945
4. 직접경비	427,382,089	548,116,455	120,734,366
5. 물가상승비	31,518,912	75,709,937	44,191,025
- 제1회 ESC	31,518,912	43,280,224	11,761,312	K1=3.97%
- 제2회 ESC	-	32,429,713	32,429,713	K2=3.80%
공급가액	1,242,781,818	1,596,000,000	353,218,182
6. 부가가치세	124,278,182	159,600,000	35,321,818
7. 손해배상보험료	16,000,000	20,000,000	4,000,000
용역금액	1,383,060,000	1,775,600,000	392,540,000

Ⅴ		조치계획

상기 보고내용과 같이 준공기한 연기 및 설계변경 시행

붙임 : 1. 총차2회 및 4차1회 변경내역 각 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.