등록번호

교통행정과-73041

주무관

교통시설팀장

교통행정과장

안전건설교통국장

등록일자

2016.12.13.

조영경

조봉기

이준영

12/14

이경우

결재일자

2016.12.14.

공개구분

부분공개(6)

협  조

예산팀장

김정현

계약팀장

박우동

- 제3차 서대문구 교통안전기본계획 수립 - 사업비(용역) 사고이월 계획

서 대 문 구

교통행정과

- 제3차 서대문구 교통안전기본계획 수립 -

사업비(용역) 사고이월 계획

서대문구 관내 교통사고 감소 및 중·장기 교통안전정책 방향제시를 위해 추진중인 “제3차 서대문구 교통안전기본계획 수립”과 관련하여 상위계획 미 수립으로 금년내 사업추진이 어려워 2016년 예산을 이월 조치하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함.

1		용 역 개 요

□ 용 역 명: 제3차 서대문구 교통안전기본계획 수립

□ 용역목적

○ 서대문구 관내 교통사고 감소를 위한 중·장기 교통안전정책의 목표와 전략을 제시하고 교통사고로 발생하는 피해를 최소화 시키기 위해 실제 집행력을 제고할 수 있는 교통안전기본계획을 수립

□ 계약내용

○ 용역업체: ㈜ 신진이엔씨 대표 박근주

○ 계약금액: 금34,859,000원

○ 계약일자: 2016. 6. 23.

○ 용역기간: 2016. 6. 27. ~ 2017. 2. 23.

2		예 산 현 황

□ 예산집행 현황                                         (단위: 원)

구 분	예산현액 (A)	배 정 액 (B)	지출원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액 (E)	집행잔액 (A-(D+E))
계	40,000,000	40,000,000	34,859,000	10,457,000	24,402,000	5,141,000
용 역 비	40,000,000	40,000,000	34,859,000	10,457,000	24,402,000	5,141,000

3		사고이월 예산액

□ 사고이월 예산액: 24,402,000원

□ 사고이월 사유

○ 본 과업은『제8차 국가교통안전기본계획』 및 『제3차 서울시 교통

안전기본계획』의 상위계획을 수용하여 계획을 수립하여야 하나,

○ 상위계획인『제8차 국가교통안전기본계획』는 11월 및『제3차 서울시 교통안전기본계획(안)』는 12월말에 과업 완료예정으로, 과업기간내 상위계획을 수용하기에는 절대적으로 부족함에 따라 금년내 예산 지출이 불가능하여 사고이월 조치하고자 함.

□ 예산과목

○ 편리한 교통환경 조성, 교통행정 관리, 교통행정서비스 제공, 연구개발비, 연구용역비