등록번호

일자리경제과-54962

주무관

생활경제팀장

일자리경제과장

경제재정국장

등록일자

2016.12.13.

김경배

정헌국

오면숙

12/14

오남희

결재일자

2016.12.14.

공개구분

대시민공개

협  조

계약팀장

박우동

예산팀장

김정현

영천시장 도시가스 설치공사 사고이월 계획

서 대 문 구

일자리경제과

영천시장 도시가스 설치공사 사고이월 계획

영천시장 비가리개 정비사업으로 인하여‘16. 12월 공사 착공되어 연내 집행이 어려운 도시가스 설치공사 사업비를 이월 조치하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

사 업 개 요

❍ 사업대상 : 영천시장(서대문구 영천시장길 27)

❍ 사업기간 : 2016. 8월 ~ 2017. 1월

❍ 사업내용 : 비가리개 상부 도시가스 공급 배관 설치

❍ 사업예산 : 158,440천원(국비 95,064 시비 38,026 구비 25,350)

추 진 경 과

❍ 2016. 09. 01.   도시가스 시설공사 계획(안) 수립

❍ 2016. 09. 05.   감사담당관 용역계약심사

❍ 2016. 09. 30.   실시설계용역 시행

❍ 2016. 10. 19.   실시설계용역 준공(사업비 : 10,638천원)

❍ 2016. 10. 24.   감사담당관 공사계약심사

❍ 2016. 11. 09.   도시가스 시설공사 시행

❍ 2016. 12. 01.   도시가스 시설공사 착공(계약금액 : 119,287천원)

예 산 내 용

❍ 예산과목 : 일자리경제과, 안정적인 지역경제 기반조성, 지역경제               활성화, 전통시장 활성화, 시설비및부대비, 시설비

❍ 사고이월 현황

(단위 : 원)

사업명	예산액	원인행위액	지출액	사고이월액	진행잔액
도시가스 시설공사	158,440,000	129,925,050	10,638,000	119,287,050	28,514,950

이 월 사 유

❍ 2016. 08월까지 영천시장 비가리개 내부 정비 공사 진행으로2016. 09월 도시가스 시설공사 실시설계용역 및 2016. 11월 시설공사 시행

❍ 2016. 12. 01. 착공하여 2017. 01. 09. 준공기한으로 연내 예산 집행 어려움

향 후 계 획

❍ 2017. 01. 09 : 도시가스 시설공사 준공