문서번호	도시철도토목부-15589
결재일자	2016.12.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	★주무관	토목2과장		도시철도토목부장
한재호	문병종	방영복		12/13 김진팔
협 조
	주무관		황영필
	주무관		이창진
	주무관		윤승근

『지하철9호선 3단계 920공구 전면책임감리용역』

총괄분 준공기한 연기 검토 보고

2016. 12

서울특별시 도시기반시설본부

도시철도토목부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『지하철9호선 3단계 920공구 전면책임감리용역』

총괄분 준공기한 연기 검토 보고

『지하철9호선 3단계 920공구 건설공사 전면책임감리용역』과 관련하여 9호선 기본계획 변경에 따른 총괄분 준공기한 연기에 대한  보고임.

※ 벽산(엔)S168EQA24-0031(2016.12.08.) 총괄 변경계약 요청

1		용역개요

□ 용 역 명 : 지하철9호선 3단계 920공구 건설공사 전면책임감리용역

□ 계약금액 : 5,563백만원

□ 용역기간 : 2009.11.18 ~ 2017.02.28

□ 감 리 사

토 목	건 축	기 계	전 기
벽산엔지니어링	종합건축사사무소 근정	한일엠이씨	배신엔지니어링

□ 발주현황

(단위 : 백만원)

구 분	총 괄	1~6차(준공)	7차(진행중)	장 래
용역기간	`09.11.18 ~`17.02.28	`09.11.18 ~`16.08.11	`16.08.12 ~`16.12.31	-
용 역 비	5,563	3,519	348	1,696

2		보고내용

□ 총괄분 변경 내용

(단위 : 백만원)

구 분	용 역 기 간			용 역 금 액
	당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감
총 괄	`09.11.18 ~`17.02.28	`09.11.18 ~`18.12.31	증) 22개월	5,563	5,563	-

□ 감리원 투입인원 : 변경없음

구 분	계	토 목	건 축	기 계	전 기
총 괄 (인·월)	475.227	355.251	44.000	52.000	23.976
1∼6차	305.091	297.010	2.323	3.788	1.970
7차 (진행중)	29.518	15.563	5.101	5.101	3.753
장 래	140.618	42.678	36.576	43.111	18.253

□ 변경사유

○ 국토교통부고시 제2016-713호 9호선 기본계획 변경 승인

- 사업기간 변경 : [당초] 2001년~2015년 ⇒ [변경] 2001년~2018년

3		조치계획

□ 건설공사 예정준공일은 2018년 3월이지만, 2018년 10월에 9호선 3단계 개통 예정이므로 각종 행정업무 등 현장관리에 필요한 기간을 감안하여

□ 9호선 기본계획(변경) 사업기간에 맞춰 총괄분 용역기한을 2018.12.31.까지 변경하고자 함.

붙 임 : 1. 전면책임감리 운영 계획 1부.

2. 감리단 공문 1부.  끝.