문서번호	시설과-6718
결재일자	2016.12.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장		서울역사박물관장
정욱	오삼록	나병우		12/13 송인호
협 조
	총무과장		사창훈

야주개홀 무대장치 구매 설치 사고이월 계획

2016. 12.

서울역사박물관

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

야주개홀 무대장치 구매 설치 사고이월 계획

야주개홀 무대장치 구매설치는 구동부(모터, 감속기)가 수입 물품으로 제작, 통관, 설치, 시운전 등에 소요기간이 부족(26일→85일)한 바 불가피하게 사고이월코자 함

Ⅰ		사업개요

계 약 명 : 야주개홀 무대장치 구매 설치

계약기간 : `16. 12. 5 ～ `16. 12. 31

계 약 자 : (주)터보이엔지(대표 : 최윤서)

계약금액 : 금125,111,200원

사업내용 : PLACARD BATTEN 외 7종 신설 및 교체

추 진 경 과

- 구매발주 : 2016. 11. 14.

- 구매계약 : 2016. 12. 5

- 구동부 발주 : 2016. 12. 7(외자물품)

Ⅱ		사고이월 내용

사고이월금액 : 125,111,200원

예산과목  : 서울역사박물관, 역사와문화의 복합공간창조,

관람지원기반구축, 박물관 유지·운영, 시설비

계약기간

- 당 초 : 2016. 12. 5 ~ 2016. 12. 31

- 변 경 : 2016. 12. 5 ~ 2017.  2. 28

사고이월사유

- 구동부(모터, 감속기)가 수입물품으로 제작, 통관, 설치, 시운전 등에

소요기간이 부족(26일→85일)한 바 불가피하게 사고이월코자 함

Ⅲ		향후계획

무대장치는 12월말까지 수입물품을 제외한 구조물은 사용가능토록

설치하여 대관 승인에 지장 없도록 추진 예정

향후일정

· 2017.  1. 13 : 구동부 생산완료 및 제품 출하(오스트리아)

· 2017.  1. 16 : 인천공항 도착 및 통관

· 2017.  1. 19 : 무대장치 제작공장 입고

· 2017.  1. 26 : 구동부 조립

· 2017.  2.  2 : 구동부 설치

· 2017.  2.  8 : 와이어, 바튼 등 설치

· 2017.  2. 15 : 기타 설치

· 2017.  2. 22 : 시운전

· 2017.  2. 28 : 준 공

첨부 : 1. 서울역사박물관 야주개홀 무대장치 납기 연장 요청.  1부.

2. 무대장치 납기관련 의견 1부.  끝.