투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약체결 - 한강공원 나들목 증설공사(신청담,개화) 전면책임감리 용역 3차

1. 치수과-4260(2016.12.5.)호와 관련입니다.

2. 「한강공원 나들목 증설공사(신청담,개화) 전면책임감리 용역 3차」건에 대하여 다음과 같이 변경계약을 체결하고자 합니다.

계 약 현 황	공 사 명	한강공원 나들목 증설공사(신청담,개화)전면책임감리 용역 3차
	계약상대자	(주)동일기술공사 (대표 : 김수보)
	계약일자	2016.01.04. (총 차 : 2013.04.26.)
	계약금액	1,273,100,000원 (총차 : 508,000,000원)
변 경 내 역	내 용	계약기간 변경 (총차2016.01.04. ~ 2017.12.31.)
	변경사유	우리시 재정 여건상 투자계획 차질로 인한 절대공기 부족
기 간 변 경	변경전착공일자		2016.01.04.	변경후착공일자	2016.01.04.
	변경전금차준공기한		2016.12.31.	변경후금차준공기한	2016.12.31.
	변경전총공사기한		2016.12.31.	변경후총공사기한	2017.12.31.

붙     임 : 1. 용역변경계약서 1부.

2. 계약의뢰서 1부.

3. 변경계약보증서 1부.

4. 용역계약 조건 및 관련 예규.  끝.

주무관	주홍열		총무과장	박병현		총무부장	12/13 이상국
협조자
시행	총무과-22131	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/		/	부분공개(5)